문서번호	공원여가과-2747
결재일자	2016.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	팀장	공원여가과장	동부공원녹지사업소장
김학석	윤지용	윤세형	07/22 이춘희
협 조
	시설과장		진병규
	시설팀장		임록화
	주무관		김영균

관급자재(냉,난방공조기) 납품기한 연기검토

2016.07

동부공원녹지사업소

공원여가과

보라매공원 현장근로자 근로환경 개선 공사』

관급자재(냉,난방 공조기) 납품기한 연기 검토보고

보라매공원 현장근로자 근로환경 개선 공사 관련 관급자재(냉·난방 공조기)납품 기한 연기가 필요하여 아래와 같이 보고 드리고 처리하고자 합니다.

사업개요

❍ 건    명 : 관급자재(냉,난방 공조기) 조달 구매

❍ 계약업체 : 삼성전자주식회사  대표 권 오현

❍ 구매물품 : 냉,난방기외 부대설비 15종

❍ 계약금액 : 금18,279,980원(조달 수수료 금93,770원 별도)

❍ 납품기한 : 2016. 07. 30.

납품기한 연기검토

❍ 납품기한 연기

- 당초 : 2016. 07. 30.

- 변경 : 2016. 09. 30.

❍ 연기사유

- `16.7.19 공정회의 사항시 논의사항으로 건축공사일정에 맞추어 냉,난방기 설치시기 조정(납품기한 연기)

❍ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

조치계획

❍ 계약 부서인 공원운영과에 납품기한 연기 의뢰 요청하여 공사 시행에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 분할납품 요구 및 통지서(계약서류) 1부. 끝.