문서번호	생태공원과-2317
결재일자	2016.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생태공원과장	공원부장
서은교		최병언	07/22 代윤병헌
협조
	주무관		김대호

『한강 이촌권역 자연성회복사업』

실정보고사항 검토보고(3회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 07.

한강사업본부

(생태공원과)

『한강 이촌권역 자연성회복사업』

실정보고사항 검토보고(3회)

『한강 이촌권역 자연성회복사업』시행중 공사감독 부서인 시설관리공단의 실정보고에 대한 검토결과를 보고 드림.

⇒ 공사감독3처-5961(2016.07.20.) 자전거도로 관련시설 등

공사개요

공 사 명 : 한강 이촌권역 자연성회복사업

공사기간 : ‘16.02.29.~’17.12.19.(1차 ‘16.02.29~’16.12.31)

도 급 비 : 총차 3,315,472천원(1차 1,700,000천원)

도 급 자 : 임원개발(주) 대표 이대성

감 독 청 : 서울시시설관리공단

실정사항 검토결과

검토요청 사항

분야별	검토요청사항	검 토 내 용	검토결과
부 대 공	□ 민원해소방안 검토(이촌2동) - 민원내용 : 이촌동 380번지 대림 및 현대아파트 주민이 육교건너 한강공원 진입시 자전거와 보행자 충돌 등 안전 문제 예상 생태공원과-1884(‘16.6.21)	□ 교통안전표시판 및 차선규제봉 설치하여 자전거 및 공원이용 시민의 안전사고 사전 예방 - 교통안내표지판 : 4개소 - 차선규제봉 : 55개 설치 - 개략공사비 : 증) 3,061천원	검토내용 반영
	□ 가림막(EGI)휀스 설치시 시민안내를 위한 사업안내 홍보판 부착 지시 생태공원과-1439(‘16.5.19)	□ 사업안내 홍보판 제작 설치 - 규격 : 6.0m×1.8m, 4개소 - 개략공사비 : 증) 4,367천원	검토내용 반영

현장실정 검토내용

분야별	현황 및 문제점	실정보고 내용	검토결과
토 공	□ 저수호안 정비시 수평규준틀 설치 제외	□ 저수호안 절토공사로 수평규준틀 설치 제외 - 수평규준틀 : 18개소 → 0개소 - 개략공사비 : 감) 1,300천원	실정보고 내용반영
	□ 기존주차장 콘크리트깨기 두께 상이 및 자전거도로 신설구간 터파기 중 각종 폐기물 발견	□ 주차장 콘크리트 두께 정산처리 (당초T: 0.2m→변경T: 0.28m) - 깨기수량 : 246㎥ → 344㎥ - 개략공사비 : 증) 2,400천원 (폐기물 별도) ※자전거도로 터파기 시 각종 폐기물은 추후 계량전표로 정산	실정보고 내용반영
포 장 공	□ 신설 자전거도로와 호안정비 시점부 위치가 동일선상에 있어 자전거도로 완료후 호안정비시 위치 근접에 따른 공사의 어려움 및 자전거 이용시민 안전사고 우려	□ 기존 자전거도로와 신설 자전거도로 접속 위치를 변경하여 안전사고 사전방지를 위한 신설 자전거도로 추가 포장 - 포장물량 : 81a → 86a - 개략공사비 : 증) 6,129천원	실정보고 내용반영
	□ 기존 자전거도로에 표시되어 있는 각종 안내문구 일부 누락	□ 누락된 일부문자 추가 도색 - 도색물량 : 525㎡ → 594㎡ - 개략공사비 : 증) 1,610천원	실정보고 내용반영
우 수 공	□ 신설 자전거도로(STA.No.6지점)에 기존 토사수로 횡단에 따른 배수시설 필요	□ 기존 토사수로에 흄관을 부설하여 자전거도로 횡단 및 우천시 우수 원활처리 - 흄관물량 : D=600㎜, L=57.5m - 개략공사비 : 증) 7,100천원	실정보고 내용반영

개략공사비 변경

1차 공사비

(단위:천원)

구 분	당초금액 (도급금액)	변경금액			변경금액	비고
		전회	금회(증)	계
도 급 비	1,700,000	91,800	23,367	115,167	1,815,167
공급가액	1,545,455	83,454	21,243	104,697	1,650,152
부 가 세	154,545	8,346	2,124	10,470	165,015

보고자 의견

실정보고사항 검토결과 그 내용이 적정하므로 공사감독부서로 실정검토내용과 같이 승인 통보하고 추후 설계변경시 물량 증·감 사항에 대해 정산처리하고자 함.

붙 임 : 시설관리공단 실정보고 관련문서 1부.  끝.