문서번호	설비부-11470
결재일자	2016.7.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
박시현		여인웅	07/19 권오식
협 조

『서남 분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 전면책임감리용역』

설계변경(총차 4회, 5차 2회) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 07

도시기반시설본부

(설  비  부)

『서남 분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 전면책임감리용역』

설계변경(총차 4회, 5차 2회) 검토보고

「서남 분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 」공기 연장에 따른 책임감리 용역기간(5차) 조정에 대한 설계변경 검토 보고 임.

Ⅰ				관련근거

○ 설비부-8633(‘16.05.31.) 서남분뇨 감리원 투입기간 조정보고 승인 통보

○ 도화(감리)2016-9470(2016.7.14.)

책임감리용역 총괄 4회 및 5차 2회 변경설계서 제출.

Ⅱ				용역개요

○ 용 역 명 : 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 전면책임감리용역

○ 사업규모 : 분뇨처리시설 4,000톤/일 신설, 기존시설 철거 및 상부공원화

○ 용역기간 : 총차 2012.01.02.~2016.07.31.(5차 ‘15.10.15 ~ ’16.7.31)

○ 계약금액 : 2,686,550천원(5차 562,490천원)

○ 계약업체 : ㈜도화엔지니어링 외 1개사

Ⅲ				설계변경 보고내용

○ 설계변경 내용

구 분		당 초	변 경	증·감
용역 금액	총차	2,686,550천원	2,756,370천원	증)69,820천원
	5차	562,490천원	632,310천원	증)69,820천원
용역 기간	총차	‘12.01.02~’16.07.31	‘12.01.02~’16.11.15	증)3.5개월
	5차	‘15.10.15~’16.07.31	‘15.10.15~’16.11.15	증)3.5개월

○ 설계변경 주요내용

-. 책임감리원 및 사무보조원 투입기간 연장

· 사    유 : 공사 준공기한 연장에 따른 투입기간 연장.

· 투입기간 : ‘16.7.31 → ’16.11.15.까지 3.5개월 연장

· 소요예산 : 증)69,820천원

-. 보조감리원 투입기간 및 시기 조정

· 책임감리원 환산비 1.219→0.785 조정으로 보조감리원 투입기간              2개월 증가

· 기계, 조경 감리원 3개월 연장, 전기감리원 1개월 단축.

· 소요예산 증가 없음.

-. 감리원 투입 계획표                      ( ― 당초,    ― 변경)

Ⅲ				조치의견

○ 공사기간 연기에 따른 책임감리용역 기간 연장으로 책임감리원 용역         비용 증가 및 보조감리원 투입기간 조정 내용이 적합하므로,

○ 감리 업무 수행에 차질이 없도록 설계변경을 시행하여 안전 및 품질         관리 등 공사관리에 만전을 기하고자 합니다.

따로붙임 : 1.관련공문. 1부. 끝.