과 장		02/18 안완순	심사자	구성철		설계자		김승진	설 계		심 사		결 재
									2014년 2월18일		2014년 2월18일
설 계 서(최종)
	용 역 명 : 2013년 도로시설물보수공사 건설폐기물 수집.운반 및 처리용역(강서)
	구 분				당 초		변 경			증 감		비 고
	총 용 역 비				76,901,000		55,000,000			21,901,000		(감)
	도급비	공 급 가 액			69,910,000		50,000,000			19,910,000		(감)
		부 가 가 치 세			6,991,000		5,000,000			1,991,000		(감)
		계			76,901,000		55,000,000			21,901,000		(감)
용역개요 : - 폐기물운반 : (당초) 5,627톤 ⇒ (변경) 3,019톤 - 폐기물처리 : (당초) 1,599톤 ⇒ (변경) 1,848톤