문서번호	기전설비과-3049
결재일자	2016.8.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
심보현		김남수	08/11 박상돈
협조

2016년 한강공원 야외수영장 설비보수공사

기성(부분)금 지급 검토 보고(1차)

2016. 08

한강사업본부

(기전설비과)

2016년 한강공원 야외수영장 설비보수공사

기성(부분)금 지급 검토 보고(1차)

『2016년 한강공원 야외수영장 설비보수공사』와  관련하여 (부분)준공에 따라, 1차 기성금 지급 요청 사항의 검토 내용을 보고 드림

▢ 추진 근거

□『 2016년 한강공원 야외수영장 기전설비 보수공사 계획 : 기전설비과-  427호(‘16.2.4)

□ 기성검사조서 1차 제출(2016년 한강공원 야외수영장 설비보수 공사 :

시설관리공단 공사감독3처 – 6252호(‘16.07.28)

▢ 공사 개요

□ 공 사 명 : 2016년 한강공원 야외수영장 설비보수공사

□ 공사업체 : 해양공조(주)*******

□ 계 약 일 : 2016. 3. 24(착공일:2016. 3. 28)

□ 준 공 일 : 2016. 10. 10

▢ 기성 공사 내용

□ 여과기 분해조립, 세척, 시운전 : 전체 여과기 53대

□ 여과포 교체 : 662개(망원-217, 여의도-445)

□ 샤워기 설치 : 166셋트(664개)

□ 발란싱탱크(칩수정) 청수 및 이물질 제거 : 20개소

□ 잠실수영장 노후 배수관 교체 : 600A, 38m

□ 밸브류 교체 : 50~300mm, 89개

□ 시설물 설치 : 잠원수영장 유아용 물놀이 슬라이드 설치

- 3,260㎜(W)×4,927㎜(D)×4,500㎜(H)

▢ 금회 기성금 내역

월 별	기 성 내 역	계약금액	기성금액		기 타
			지급액	지급잔액
합 계		538,141,460	430,414,693	107,726,767	80%지급
4월	선 급 금		161,442,440	376,699,020	선급금
8월	기선금(3~7월)		268,972,253	107,726,767	기성 1차분

▢ 검토 의견

□ 2016년 한강공원 야외수영장 설비보수공사 1차 기성금 지급 요청건에 대한 검토 결과, 관련규정에 의거 적정하다고 판단되어 선금을 지급하고자 함.

붙임 : 1. 기성(부분)청구공문 1부.

2. 기성검사원 1부.

3. 기성(부분)내역서 1부.

4. 선급금 정산내역서 1부.

5. 준공사진 1부.  끝.