투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	하천점용허가기간 연장신청(월드컵대교)

1. 운영총괄과-1608(2015. 8.27.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 「월드컵대교 건설공사」에 대하여 아래와 같이 하천점용허가기간 연장을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

〇 하천점용허가기간 연장 신청 현황

구분	하천명	점용목적	점용면적 (㎡)	점용기간		연장사유	비고
				당초	변경
기간연장	한강	당해 공사로 인한 작업장 사용 및 가설휀스 설치 등	11,608	‘15.9.1.~ ‘16.8.31.	‘15.9.1.~ ‘17.8.31.	월드컵대교 북단IC 접속교 및 연결로 공사시행 계속

붙  임 : 1. 하천점용허가기간 연장 신청서 1부

2. 위치도, 점용현황 등 관련자료 각 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울특별시한강사업본부장(운영총괄과장),서울특별시한강사업본부장(수상기획과장),서울특별시한강사업본부장(수상안전과장),서울특별시한강사업본부장(난지안내센터장)
주무관	심규진		토목총괄과장	이동훈		토목부장	08/12 김영수
협조자	주무관	오열상
시행	토목부-16757	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2547	/전송	02-3708-2599	/	forete11@seoul.go.kr	/	대시민공개