투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	시설보수과장
(경유)
제 목	변경계약 체결 통보(난지물재생센터 폐기물 적치장 설치공사-3차)

1. 시설보수과-2798(2016. 8. 24.)호와 관련입니다.

. 2. 귀과에서 의뢰한 『난지물재생센터 폐기물 적치장 설치공사』건이 변경계약 체결 되였기에 알려드립니다.

가. 건    명 : 난지물재생센터 폐기물 적치장 설치공사-3차

나. 최초계약체결일 : 2016. 06. 13

다. 변경계약체결일 : 2016. 08. 24

라. 계 약 업 체 : 청하건설(주) 대표 심경수

마. 변경전계약금액 : 금126,264,160원(금일억이천육백이십육만사천일백육십원)               바. 변경후계약금액 : 금119,020,000원(금일억일천구백이만원)

(감액 7,244,160원)

사. 준공기한 : 2016. 08. 24.(변경없음)

아. 변 경 사 유

1) 발주자가 시행토록 된 폐기물 처리비 및 운반비 감액

2) 각종 보험료 정산

3) 기타 물량 변경

붙임 : 1. 공사변경계약서 1부.

; 2. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	지두연		관리과장	윤석경		난지물재생센터소장	08/24 정흥순
협조자
시행	관리과-7804	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426	/
전화	02)300-8516	/전송	02)300-8518	/	nanji71@seoul.go.kr	/	부분공개(5)