문서번호	도로보수과-4727
결재일자	2016.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	남부도로사업소장
홍민표		김준섭	08/26 이덕기
협조

불량맨홀 정비 완료보고(1차)

(‘16년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가))

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 8

남부도로사업소

(도로보수과)

불량맨홀 정비 완료보고(1차)

현재 시행중인『‘16년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가)』관련 1차 작업지시 완료건 대한 그 결과 보고임.

□ 관련근거

○ 도로보수과-3113호(2016.6.8.), 4297호(2016.8.2.) : 1차 작업지시

○ 우암16-08221호(2016.8.22.) : 1차 작업지시 완료보고 제출의 건

□ 공사개요(1차)

○ 공 사 명 : ‘16년 관내 포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)

○ 도 급 자  : ㈜우암건설 대표 고원준

○ 1차 작업지시 내역 : 불량맨홀 정비 260개소

○ 1차 작업기간 : 2016. 6.13. ~ 8.28.

□ 보고내용

○ 정비완료 현황                                          (단위 : 개소)

구 분	대상물량	정비완료			정비 미시행
		소계	본공사 정비	기타공사 정비
수 량	260	248	242	6	12

○ 1차 정비대상(260개소)중 248개소 정비시행 완료했으며, 세부 정비완료 내역은    본공사 242개소, 기타공사(포장공사, 맨홀관리기관 자체정비) 6개소 정비시행 완료.

○ 정비 미시행(12개소) 세부내역은 선행공사(노후포장공사:사당로5개소) 미실시, 맨홀    관리기관 자재공급 불가, 맨홀관리기관 자체정비 (추가)요청 등의 사유로 정비 미시행.

- 사당로(5개소) 미정비 물량의 경우 2차 작업물량에 포함하여, 노후포장공사 시행후 정비실시

□ 행정사항

○ 맨홀관리기관 자재공급 불가로 인해 불량맨홀 정비 미시행분은 대상 맨홀에 대하여    맨홀관리기관이 자체적으로 특별 관리할수 있도로 맨홀관리기관에 통보코자함.

붙 임 : 1차 작업완료 현황 1부.  끝.