문서번호	방재안전시설부-2768
결재일자	2014.2.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재안전시설부장
김상용		박희천	02/20 박종웅
협 조	환경설비과장			이달영
	조경시설과장			신용우
	주무관			이호기
	주무관			박태욱
	★주무관			임성은

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

설계변경(전체10회, 3차3회) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 2.

도시기반시설본부

(방재안전시설부)

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

설계변경(전체 10회, 3차3회) 검토보고

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업과 관련 계약금액내 조정 실정보고(분뇨현장 연결우회도로 변경 등 3건) 승인분과 계약금액 증감분 실정보고(중력농축조 추가철거 등 11건) 승인사항 반영 및 차수공사 물량조정으로 인한 설계변경(전체10회, 3차3회) 검토 보고임.

관련근거

○ 도화(감리)2014-7642호(‘14.02.19) : 전체10회, 3차3회 설계변경도서 제출

공사개요

○ 공 사 명 : 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

○ 규    모 : 고도처리시설개량 115만톤/일, 시설현대화 36만톤/일, 기존시설존치 12만톤/일

○ 공사기간 : 전체 2009. 11. 09 ～ 2015. 08. 09

3 차 2012. 02.06 ～ 2014. 02. 28

○ 계약방식 : 설계시공 일괄입찰(T/K)

○ 도 급 비 : 전체 278,624백만원

3 차  25,517백만원

○ 시 공 사 : 대림산업㈜외 5개사

○ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링외 1개사

설계변경

[전체10회]

◦ 주요 변경내용                                            (금액 : VAT포함)

구분	설계 변경 주요내용	공 사 비 (백만원)	비 고
계약금액내조정분	・분뇨현장 연결 우회도로 실정보고 선형변경 : 313m → 209m 포장재질 변경 : 아스콘 → 콘크리트 BY-PASS관로 보강 추가	증 142	SMIH-13-05123 (2013.03.25)
	・수목제거에 따른 임목폐기물 실정보고 제거수목 폐기물 상차 및 처리 : 68ton	증 2	SMIH-13-05048 (2013.03.19)
	・탈황설비 하우징 실정보고 외부노출된 부대설비 하우징 및 팬스 설치	증 128	설비부-5839 (2013.05.30)
	・ 계약금액 조정분	감 272
계		0

구분	설계 변경 주요내용	공 사 비 (백만원)	비 고
계약금액증감분	・중력농축조 추가철거 실정보고 중력농축조 하부 펌프(16대) 및 배관 추가 철거	증 50	설비부-12430 (2012.12.03)
	・1처리장 GBT삭제 실정보고 슬러지 케익발생량을 위한 공정변경에 따라 농축설비 및 부대시설 삭제	감 116	설비부-3766 (2012.04.10)
	・가스엔진발전기 삭제 실정보고 LNG겸용으로 가스엔진발전기로의 개량이 실효성이 없어 삭제	감 334	설비부-9273 (2012.09.04)
	・석면폐기물 처리 실정보고 구조물 철거시 발생하는 석면폐기물(1.7ton) 처리	증 15	SMIH-13-11031 (2013.11.27)
	・고도처리 총인처리 설계비 고도처리 총인처리시설 기본 및 실시 설계비	증 349	설비부-3958 (2013.04.16)
	・고재매각 실정보고 고도처리개량 및 시설현대화시 발생한 고재 매각대금	감 1,285	설비부-1639 (2014.02.12)
	・건설기계대금 지급보증서 발급수수료 실정보고	증 219	SMIH-14-14588 (2014.01.08)
	・공사손해보험료 실정보고 공사비 증액에 따른 공사손해보험 추가 가입	증 140	방재안전시설부-2391(2014.02.17)
	・시운전 성능확인 수수료 실정보고 성능확인검사기관 변경에 따른 실정보고 (공인기관 → 직접수행)	감 59	C시책사업부-126 (2011.08.30)
계		감 1,021

○ 변경사유 : 실정보고 승인사항(14건) 반영

◦ 변경내역                                                           (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
전체공사 (10회변경)	직접공사비	175,176,020,956	175,086,540,522	-89,480,434
	간접공사비	103,447,979,044	102,516,459,478	-931,519,566
	도 급 액	278,624,000,000	277,603,000,000	-1,021,000,000

[3차 3회]

◦ 주요 변경내용                                           (금액 : VAT포함)

구분	설계 변경 주요내용	공 사 비 (백만원)	비 고
3 차 공 사	・분뇨현장 연결 우회도로 실정보고 선형변경 : 313m → 209m 포장재질 변경 : 아스콘 → 콘크리트 BY-PASS관로 보강 추가	증 161	SMIH-13-05123 (2013.03.25)
	・수목제거에 따른 임목폐기물 실정보고 제거수목 폐기물 상차 : 68ton	증 0.3	SMIH-13-05048 (2013.03.19)
	・탈황설비 하우징 실정보고 외부노출된 부대설비 하우징 및 팬스 설치	증 128	설비부-5839 (2013.05.30)
	・중력농축조 추가철거 실정보고 중력농축조 하부 펌프(16대) 및 배관 추가 철거	증 50	설비부-12430 (2012.12.03)
	・조경분야 예비준공검사 지적사항 조치(조경→토목)	0	도화(서남)2014-069호 (2014.02.14)
	・석면폐기물 처리 실정보고 구조물 철거시 발생하는 석면폐기물(9kg) 처리	증 0.7	SMIH-13-11031 (2013.11.27)
	・고도처리 총인처리 설계비 고도처리 총인처리시설 기본 및 실시 설계비	증 349	설비부-3958 (2013.04.16)
	・고재매각 실정보고 고도처리개량 및 시설현대화시 발생한 고재 매각대금	감 1,285	설비부-1639 (2014.02.12)
	・시운전비 차수변경 3차공사 시운전6비 잔여분을 4차공사로 변경	감 34	방재안전시설부-2405 (2014.02.17)
	・간접비 정산 건강/연금/장기요양/안전관리비/환경보전비 /퇴직공제부금/하도대금지급수수료	감 14
	・설계비 변경(1,695백만원 → 2,335백만원)	증 644
계		0

◦ 변경사유 : 실정보고 승인사항(12건) 반영 및 차수공사 물량조정

◦ 변경내역                                                      (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
3차공사 (3회변경)	직접공사비	15,533,363,996	15,797,757,158	264,393,162
	간접공사비	9,983,636,004	9,719,242,842	-264,393,162
	도 급 액	25,517,000,000	25,517,000,000	변경없음

검토 및 조치계획

○ 제출된 설계변경도서를 검토한 바, 전체공사는 계약금액내 조정분(계약금액 변경 없음) 실정보고 3건과 계약금액 증감분 실정보고 11건의 승인사항을 반영한 것이며,

○ 3차공사는 실정보고 12건 및 차수공사 물량조정으로 계약금액 변경없이 정산하는 내용으로,

○ 책임감리원의 검토의견이 적절하다고 판단됨으로 보고내용과 같이 설계변경(전체10회, 3차3회)을 시행코자 함.

붙임 : 1) 책임감리원 검토의견서 1부.

2) 변경내역서(전체10회, 3차3회) 1부. 끝.