함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	작업구 가시설 추가(연장증가) 실정보고 승인통보 (공덕로타리~한겨레신문앞간 송배수관)

1. 공사감독2처-10680(2016.08.29)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 제출한『공덕로타리~한겨레신문앞간 송배수관정비공사(비굴착갱생)』에 대한 작업구 가시설 추가(연장증가) 실정보고에 대하여 아래와 같이 승인하오니 공사장 안전관리에 만전을 기하여 주시고, 실제시공한 수량에 대하여는 추후 설계변경에 반영하시기 바랍니다.

가. 시설관리공단 검토내용 및 수도사업소 의견

검토 사항	시설관리공단 검토 내용	수도사업소 검토 의견
○#1작업구 위치변경	○#1작업구 약20m 이동설치 : 공사비 약9백만원 증가	○#1작업구 약20m 이동 설치 승인
○#1~2작업구 사이 작업구 추가설치	○#1~2작업구 사이 작업구 추가 설치 : 공사비 약6백만원 증가	○#1~2작업구 사이 작업구 추가 설치 승인

끝.

	서부수도사업소장
주무관	김승완		주무관	함현준		급수운영과장	09/01 박길영
협조자
시행	급수운영과-21228	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/
전화	3146-3651	/전송	3146-3689	/	wan300@seoul.go.kr	/	대시민공개