투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	조달구매 납품기한 연기요청(화강석)

1. 시설과-3625(2015.5.18.)호, –9254(2015.12.11.)호 및 공원운영과-22925(2015.12.3.)호와 관련입니다.

2. 남산 회현자락 한양도성 보존・정비 및 공원 조성공사와 관련, 화강석 구매 건에 대하여 아래와 같이 물량 변경계약 및 납품기한 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 남산 회현자락 한양도성 보존・정비 및 공원 조성공사 화강석 구매

나. 물량 변경내용

물품식별 번 호	품명	규격	단위	수량	금액(원)	납품기한		비고
						당초	변경
계					80,054,200	2016.9.30	2016.12.10
20149591	장대석(포천석)	300×300× 1000, 잔다듬	개	314	40,820,000
	통석의자(고흥석)	1500×450× 500, 물갈기, 거친정다듬	개	24	15,360,000
	가공경계석 (고흥석)	200×250× 1000, 거친정다듬	개	210	23,100,000
	가공낮춤경계석 (고흥석)	200×250× 1000, 거친정다듬	개	7	774,200

다. 변경사유 :  문화재 공정 보류 따른 납품기한 연기.

붙임 : 관급자재 변경 현황 1부.  끝.

	시설과장
조경팀장	이무림		시설과장	09/29 김재균
협조자
시행	시설과-7198	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231 4층(예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5966	/전송	02-3783-5969	/		/	대시민공개