함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	물품 변경 계약 체결 (자양취수장 구의계통 취수펌프 제작구매)

1. 기전설비과-8161(2016. 9. 29.)호 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 ‘자양취수장 구의계통 취수펌프 제작구매 계약’을 아래와 같이 변경하여 계약을 체결하고자 합니다.

가. 계약건명 : 자양취수장 구의계통 취수펌프 제작구매

나. 계약업체 : 한성중공업

다. 계약금액 : 396,000,000원

라. 변경내용 : 계약기간 변경

구 분	당초	변경	비 고
기간	2016.5.24.~ 2016.9.30.	2016.5.24.~ 2016.10.31.	증 31일

마. 변경 사유 : 우리본부 귀책사유임

- 도수관로 누수 및 보수로 인하여 통수일이 지연되어 펌프 효육측정이 불가하므로 계약기간을 연장하고자 함

따로붙임 : 변경계약 합의서 및 내역서 각 1부. 끝

주무관	황한범		재무회계과장	박병식		요금관리부장	09/29 代조두업
협조자
시행	재무회계과-14102	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1243	/전송	02-3146-1209	/	h2sb@seoul.go.kr	/	부분공개(5)