투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(공사 일시 중지 기간 변경 알림)

1.업무지시현장 :  석촌지하차도 상부도로 구조개선공사 주식회사 천일, 석촌지하차도 상부도로 구조개선공사 거현산업(주), 석촌지하차도 상부도로 구조개선공사 (주)이산

2.작 성 일 자 : 2016-10-04 09:10:53

3.지 시 내 용: 석촌지하차도 상부도로 구조개선공사 현장의 공사 일시 중지기간이 아래와 같이 변경 되었음을 알려드리니 책임기술자께서는 현장 인력을 전원 철수 조치하여 주시기 바랍니다.

- 공사일시중지기간

당 초 : 2016.6.13. ~ 2016.9.30.

변 경 : 2016.6.13. ~ 2017.2.28.  끝.

주무관							박상철			광역도로과장					10/04 진재섭
협조자
시행			토목부-20105									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2559						/전송			02-3708-2599					/	scpark555@seoul.go.kr												/	대시민공개