문서번호	체육정책과-12057
결재일자	2016.10.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		체육시설팀장	체육정책과장
정성윤		이용민	10/14 이구석
협조

안양천 다목적광장조성사업 현황 보고

2016. 10.

체육정책과

안양천 다목적광장 조성사업 현황 보고

안양천에 계획된 징검다리조성이 서울지방국토관리청의 하천점용허가 지연으로 미설치 된 상태에서 공사 계약기한 도래로 준공처리(도시기반시설본부),

잔여공사 이행을 위하여 구로구로 사업예산(350백만원)을 재배정코자 함

□ 사업개요

○ 목    적 :  돔야구장 교통혼란을 최소화 할 수 있도록 안양천변에 우회

도로 및 포장(예비주차장) 등을 포함한 시민편의 제공

○ 위    치 :  서울시 구로구 구로동 621-8(천) 일대

○ 규    모 :

- 다목적 광장 : A=5,474㎡ ⇒ 주차면수 120대(버스 12대 포함)

- 진출입로 : B=3~8m, L=270m, 징검다리 1개소, 기타 1식

- 자전거 전용도로 : B=4m, L=276m / 보행자 전용도로 : B=2m, L=272m

○ 총사업비 : 3,500백만원

○ 사업기간 : 2015. 6. 4. ~ 2016. 7. 31.

□ 추진 경위(현황)

○ ´15.06.04 : 안양천변 다목적광장 조성사업 시행계획 통보(시→도기본)

○ ´15.10.02 : 안양천변 다목적광장 조성사업 추진계획 보고

- 실시설계 및 시설공사 (도기본 토목부)

○ ´15.12.01 : 공사 착공(도기본)

○ ´15.12.17 : 다목적광장 하천점용허가(서울지방국토관리청)

○ ´16.1월 ~ 7월 : 징검다리 설치 하천점용허가 4회 협의

- 하천점용신청내용

· 사업목적 : 고척교 보도교의 이동 인구를 분산시키고, 하천경관을 따라              야구장까지 이동하는 동선 계획을 수립

· 사업개요 : 징검다리 1개소 (폭 2.4m, 길이 62m)

- 서울지방국토관리청 의견 : 고척교 교각 안전을 위해 이격거리 확보 등

○ ´16.08.01 : 안양천(고척교) 인근 징검다리 설치관련 협의(구로구)

- 돔구장주변 개선공사에 계획된 돔구장주변 징검다리 설치 지연에 따라 지역주민 민원발생, 현재 단계에서 공사 집행잔액의 재배정 요청

○ ´16.08.08 : 서울지방국토관리청 방문(구로구)

- 고척교 상류측 징검다리 설치에 긍정적인 답변(서울지방국토관리청)

○ ´16.08.23 : 안양천(고척교) 인근 징검다리 ‘17년 예산확보 요청(구로구)

○ ´16.08.31 : 공사 준공(도기본)

○ ´16.09.13 : 사업비(서남권 돔야구장 건립) 감배정 요청(도기본)

- 감배정 사유 : 하천점용허가 지연으로 인한 징검다리 미시공 잔액발생

구 분	재배정액	지출액	잔 액 (감배정)
도시개발특별회계 (명시,사고이월)	3,613,390	3,154,601	454,000

□ 향후 계획

○ 잔여사업(징검다리 설치) 시행 : ’16.11. ~ ’17.5.

- 시행부서(기관) : 구로구(치수과)

- 사업개요 : 징검다리 1개소(폭 2.4m, 길이 62m)

- 사 업 비 : 350백만원

붙 임   1) 위치도 1부.

2) 서남권 돔야구장주변 보행자전용도로 설치 및 고척교 확장공사 현황 1부. 끝.