투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경 시행(2회,정산)-광화문 차도구간 정비공사

우리사업소에서 시행중인 “광화문과장 차도구간 정비공사”에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 광화문광장 차도구간 정비공사

나. 공사기간 : 2016. 10. 20. ~ 2017. 11. 30.

다. 도 급 자 : 승백건설㈜  대표 이기수

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증, 감
총 공 사 비		970,899,070	864,682,000	감)106,217,070
도급비	공 급 가 액	371,569,510	489,481,819	증)117,912,309
	부가 가치세	37,156,950	48,948,181	증) 11,791,231
	계	408,726,460	538,430,000	증)129,703,540
관 급 비		443,172,610	164,662,000	감)278,510,610
이 전 비		119,000,000	161,590,000	증) 42,590,000

마. 설계변경사유 : 정비물량 증가.

바. 준공기한 연기

- 당초 : 2017.11.30.

- 변경 : 2017.12.31.

- 사유 : 보수물량 증가 등

사. 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리, 노후포장도로 정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

따로붙임  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.   끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	이화신		도로보수과장	김학동		북부도로사업소장	11/30 신응수
협조자
시행	도로보수과-11818	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913 (번동)	/
전화	944-5433	/전송	945-5072	/	hwas44@seoul.go.kr	/	대시민공개