문서번호	설비부-20677
결재일자	2017.12.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
성호준		유병기	12/07 권오식
협조

『만리재로 보행환경개선 전기공사』

설계변경 검토 보고(총차, 2차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12.

도시기반시설본부

(설비부)

『만리재로 보행환경개선 전기공사』

설계변경 검토 보고(총차, 2차)

『만리재로 보행환경개선 전기공사』와 관련하여 설계변경 소위원회 결과를 반영하여 설계변경코자 검토 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 만리재로 보행환경개선 전기공사

□ 위    치 : 서울역 고가 접속부 ~ 마포구 공덕오거리

□ 규    모

○ 가 로 등 : 가로등 개량(LED 100W, 9m) 159본, 가로등 분전반 7면 등

○ 교통신호 : 교통신호기 5개소 등

□ 계약금액 : 861백만원(2차 : 768백만원)

□ 계 약 자 : (유)고려공업기업사

□ 공사기간 : `16.12.15. ~ `17.12.08.(총차)

○ 2차 : `17.06.01. ~ `17.12.08.

Ⅱ		검토내용

□ 추진경위

○ `17.11.30 : 실정보고 제출(고려17-1130-1)

○ `17.12.05 : 설계변경 소위원회 개최(제34차)

○ `17.12.06 : 설계변경 요청(고려17-1130-2)

- 설계변경 소위원회 자문내용 반영

□ 계약변경 현황

○ 변경금액

(단위 : 원)

****	****	****	*********
**	***********	***********	*************
**	***********	***********	*************

- 주요변경 내용(2차)

(단위 : 원)

***	******	***	***	*********
***	*************** ************************** ********************** ******** ****************** ********************* *************** ************************ *********************	***********	***********	***********
***	********************* ****************** ****************** ***************	***********	***********	************
*****		***********	***********	************
*		***********	***********	*************

○ 사  유

- 통합폴 사용에 따른 가로등주 물량 감소 및 가로등 암․등기구 추가

- 현장 여건 고려하여 가로등주 높이 조정

- 유지관리부서(마포구청, 중구청) 요구사항 반영

○ 예산과목

- 가로등 : 도로시설물관리, 도로 및 부속물관리, 노후도로조명개선, 시설비 및 부대비, 시설비

- 신호등 : 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리, 교통신호기 신설 및 보수, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅲ		조치의견

○ “설계변경 소위원회” 자문내용을 반영한 설계변경이 적정하여 변경계약(총차, 2차) 시행코자 함

붙임  1. 변경설계내역서 1부.

2. 원가관리시스템 검증 1부.

3. 설계변경 소위원회 결과 및 조치내용 1부.

4. 관련문서 1부.   끝.