투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	「보라매공원 배드민턴장 시설개선 사업」 설계변경 시행

1. 시설과-3370(2017.11.3.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 추진 중인 『보라매공원 배드민턴장 시설개선 사업』에 대하여 아래와 같이 설계 변경하여 공사추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 보라매공원 배드민턴장 시설개선 사업

나. 총공사비 : 금195,912,700원(금일억구천오백구십일만이천칠백원)

(도급액:금180,398,400원/ 관급자재:금15,514,300원)

다. 공사기간 : 2017. 9. 13. ~ 11. 11.

라. 도 급 자 : 화령조경주식회사 대표 신계철

마. 공사비 변경내역

(단위 : 원)

구 분	소요 금액				비고
	당 초	변경	증 / 감
총 공 사 비	195,912,700	214,747,400	증	18,834,700
공 급 가 액	163,998,546	178,561,819	-	-
부 가 가 치 세	16,399,854	17,856,181	-	-
도 급 공 사 비	180,398,400	196,418,000	증	16,019,600
관급자재비	15,514,300	18,329,400	증	2,815,100

바. 예산과목

- 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 보라매공원 시설물 정비, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

붙  임 : 1. 실정사항 검토 및 설계변경 보고서 1부.

2. 변경 내역서 1부. 끝.

주무관	최종성		공원조성팀장	송복식		시설과장	11/03 代송복식
협조자
시행	시설과-3373	(		)	접수		(		)
우	07062	서울 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소 시설과	/
전화	02-2181-1157	/전송	02-2181-1169	/	jongsung79@seoul.go.kr	/	대시민공개