문서번호	노동정책담당관-1026
결재일자	2018.1.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	복지시설팀장	노동정책담당관
정유진	송정윤	01/26 박경환

전태일 노동복합시설 리모델링 공사 자문회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 1.

일자리노동정책관

(노동정책담당관)

전태일 노동복합시설 리모델링 자문회의 결과보고

전태일 노동복합시설 리모델링 공사의 공사기간 적정성 검토를 위한 자문회의를 개최하고 결과를 보고드림

1		회의개요

○ 일    시 : 2018.1.25.(목) 15:00 ~ 16:30

○ 장    소 : 전태일 노동복합시설 예정지(관수동 152-1)

○ 참 석 자

- 노동정책담당관 복지시설팀, 도기본 건축부 의료시설과

- 설계자(하우건축사사무소 홍순목 소장)

- 건설기술심의위원(시공분야) ******************

- 건설기술심의위원(시공분야) ***************

○ 회의안건

- 현장 및 설계도서 검토 후 공사기간 적정성 검토

2		회의결과

○ 공사 특수성 검토

- 도심 공사의 민원 발생 가능성(소음, 진동, 폐기물 반출)

- 내진보강 전단벽 신설에 따른 골조공사 공기 발생

- 외벽 커튼월 더블 스킨(전태일 편지) 제작 기간 소요

- 건축물 노후에 따른 공사 중 안전사고 발생 가능성

○ 공사기간 적정성 검토

- 일반 리모델링 공사기간은 해체공사(4개월) + 마감공사(6개월) 총 10개월 정도 소요되나, 마감공사 시 인력, 장비 투입 범위에 따라 기간 단축은 가능함

- 돌관으로 추진할 경우 안전사고의 부담과 공사비 증가(1.5배) 등 위험부담이 커 공사 특수성, 관급공사임을 감안하여 11개월로 책정함이 적정함

○ 의뢰부서와 공사부서 의견 조율

- 공사기간은 11개월로 책정하나, 2018년도 회계연도 마감 전 노동복합시설 입주기관의 연내 입주를 위해 실 착공 전까지 소요되는 기간을 최대한 단축

- 철거, 구조보강, 외벽 커튼월 제작 등 주요 공정의 세밀한 공정관리 필요

3		향후계획

○ 향후일정

- 공사 발주 공고(도기본) : ’18.1.26.

- 공사 업체 선정 및 공사 착수 : ’18.2월중

○ 행정사항

- 자문위원 수당 지급 : 100,000원 X 2인

※ 개인 계좌번호로 개별 송금

- 자문회의 결과 송부(도시기반시설본부)

붙임 : 참석등록부 및 자문위원 의견서 1부.  끝.