문서번호	토목부-6504
결재일자	2018.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	여용석	04/16 김영수

세운상가앞 광역횡단보도 PC기초 절단 검토보고

(종로 중앙버스전용차로 설치공사)

2018. 4.

도시기반시설본부

(토 목 부)

세운상가앞 광역 횡단보도 PC기초 절단 검토보고

(종로 중앙버스전용차로 설치공사)

이동식승강장 기초 터파기 공사 중 세운상가 앞 광폭횡단보도 PC기초  접속 슬라브가 저촉되어 관련부서 협의후 제거 비용에 대하여 반영하고자 검토보고 드림.

공사개요

○ 위    치 : 세종대로사거리 ~ 동묘앞

○ 사업규모 : 중앙버스전용차로 설치 3.8㎞(정류소 15개소)

○ 사업기간 : 2017. 8.29. ~ 2018. 4.30.

○ 총사업비 : 148억원(도급비74억원)

○ 시 공 사 : 천마산건설㈜

추진경위

○ ‘18.12. 3. : 세운상가 앞 이동식 승강장 터파기중 PC패널 노출

○ ‘18.12. 4. : 승강장기초 현장타설 가능 유무 <주>JC데코와 협의

- 내 용 : 근입심도 부족에 따른 PC패널 제거 요구

※ 광역횡단보도 설치업체의견 : PC패널 제거시 진동/충격에 따라 기설치된 PC패널 손상 우려 ⇒ 백호 깨기작업 금지요청

○ ‘18.12.13. : 종로 BRT 도로공간 재편사업 엄부 협조(교통운영과- 본부)

- 내 용 :  어프로치 PC패널 기초 제거할 경우 기능이 유지 될수 있도록 콘크리트 보강 요청

○ ‘18.12.12. : 어프로치 제거 관련 공정회의

- 결과 : 광폭횡단보도 PC패널 기초 커팅  및 제거는 토목시공사 시행

검 토

○ 이동식 정류소 기초터파기 설치 위치에 세운상가앞 광폭 횡단보도 PC패널이 저촉되어 제거가 필요함에 따라 관련부서 협의후 제거비용에 대하여 반영이 필요함.

○ 단가적용 검토

구 분	공 종	규 격	단 위	견 적 단 가(vat별도)				비고
				견적1	견적2	견적3	적용단가
신 규	콘크리트절단	T=400mm	원	3,400,000	3,500,000	3,700,000	3,174,682
				◎			협의율 (93.37%)

○ 단가 검토  : 협의율 적용 (93.373%)

- 강제협의률 : (100%+86.746%)×100/50 = 93.373%

- 공사계약 일반조건 7절 “1-나”에 의거 계약상대자 책임없는 사유

공사비 증·감

(단위:원)

공 종	단 위	당 초	변 경	증 ·감	비 고
1)직접공사비	-	-	3,174,682	3,174,682
2)제경비 (직공비*42.437%)	-	-	734,409	734,409
공급가액	-	-	3,909,091	3,909,091
부가세	-	-	390,909	390,909
도급공사비		-	4,300,000	4,300,000

감리단 검토의견

○ 이동식 정류소 기초 터파기(#8번, #9번) 중 세운상가앞 광폭 횡단보도 PC기초가 간섭 되어 관련부서와 협의후 제거를 위하여 실정보고하는 사항은 적정함.

조치계획

○ 이동식 정류소 기초 터파기(#8번, #9번)크리트 타설을 위한 터파기 결과 세운상가앞 어프로치 PC패널이 저촉되어 제거비용 반영을 위하여 실정보고한 사항에 대하여 감리단 검토 의견과 같이 반영이 필요함.

○ 증액되는 공사비 4,300천원에 대하여는 추후 설계변경시 반영하고자 함.

붙 임 : 감리단 검토의견서 1부.  끝.