위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	문정 도시개발사업 개발계획 및 실시계획 변경 협의

1. 송파구 도시전략과-2248(2018.6.26.)호 및 서울주택도시공사 도시개발계획부-1989(2018. 6.22.)호와 관련입니다.

2. 위 호로 문정도시개발사업과 관련, 도시개발법 제4조 및 제17조에 의거 개발계획 및 실시계획변경 인가신청 신청이 있어 관계법령의 저촉 여부 등 귀 기관(부서)의 소관사항에 대한 의견을 조회하오니 2018.7.13.(금)까지 회신하여 주시기 바라며, 기간내 회신이 없을 경우에는‘의견없음’ 으로 간주 처리할 예정임을 알려드립니다.

3. 특히, 송파구청 도시전략과는 구청 내 관련부서 의견을 종합하여 회신 하시기 바랍니다.

- 협의내용 -

가. 사업시행자 변경

구 분	기 존	변 경	비 고
사업시행자	****************	***************	-

나. 사업시행기간 연장

구 분	기 존	변 경	비 고
시행기간	2007.06.28. - 2018.12.31.	2007.06.28. - 2019.12.31.	-

다. 공구 분할

구역명	위 치	변 경(㎡)				최초 결정일	비고
		계	1공구	2공구	3공구
문정도시 개발구역	송파구 문정동 649 일원	548,239.0	149,005.5	309,388.1	89,845.4	서울시고시 제2007-207호 (2007.06.28)	-

라. 실시계획(지구단위계획) 변경 : *******************

마. 건축한계선 오류 정정

붙임 : 문정도시개발사업 개발계획 및 실시계획변경 인가신청서 1부.(별도송부)  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	도로계획과장,보도환경개선과장,도시관리과장,시설계획과장,물순환정책과장,공원조성과장,도시농업과장,민방위담당관,송파구청장(도시전략과장)
주무관	정종우		도시개발팀장	강창호		도시활성화과장	07/05 한병용
협조자
시행	도시활성화과-7497	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 별관 2동2층 시설계획과	/
전화		/전송		/	asaravo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)