문서번호	도로보수과-6522
결재일자	2018.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
이종호		박병연	07/17 김용제
협조

-2018년 포장도로 긴급복구공사- 작업지시(제5차) 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 7.

- 2018년 포장도로 긴급 복구공사 -

작업지시(제5차) 계획 보고

우기철 대비 우리 사업소에서 관리하는 시도상 도로소파(예상)지역 및 균열 등이 발생한 구간에 대해서 긴급복구 공사업체에 작업지시하여 보수․정비하고자 함

□ 사업개요

❍ 공 사 명: 2018년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)

❍ 공사규모: 절삭후 덧씌우기 197a, 소파포장 49.4a, 동공작업 등

❍ 공사기간: 2018. 3. 9. ~ 12. 14.

❍ 공 사 비: 2,190백만원(도급비 1,548  관급비 311  이전비 331백만원)

❍ 도 급 자: 초인산업개발(주) 김귀용

□ 작업지시

연번	위 치	방 향	지시물량			작업방법	작업조건	차로	비고
			폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)
1	강서로 158 (안심치킨 앞 버스승강장), 버스전용차로	우장산역	3.6	22.6	81.4	인력	야간	6	T=10cm
2	강서로 308 (에코로바 앞 버스승강장), 버스전용차로	발산역	4.1	74.5	305.5	기계 (5a)	야간	6	T=10cm
3	강서로 323 (우리동네1등 할인마트 앞), 버스전용차로	우장산역	3.2	15.0	48.0	인력	야간	6	T=10cm
4	공항대로 (등촌삼거리→염창역버스전용차로)	염창역	3.8	14.0	53.2	인력	야간	6	T=10cm
5	양천로 82-1 (방화돌솥순대국 앞), 1차로	양천향교역	3.1	126.6	392.5	기계 (5a)	야간	4	T=5cm
6	남부순환로 222 (강서면허시험장 앞 횡단보도)	신월IC	12.9	18.4	237.4	기계 (5a)	야간	4	T=10cm

연번	위 치	방 향	지시물량			작업방법	작업조건	차로	비고
			폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)
7	목동동로159 (장애인종합복지관 앞 횡단보도), 1~2~3~4~5차로	오목교	16.0	15.0	240.0	기계 (5a)	야간	4	T=10cm
8	목동동로350 (목동5단지 B상가 앞 버스승가장), 5차로	이대병원	3.2	45.0	144.0	기계 (5a)	야간	4	T=10cm
9	목동서로212 (목동7단지아파트 앞 버스승강장), 5차로	양천소방소	3.0	16.0	48.0	인력	야간	4	T=10cm
10	목동서로 250 (베스킨라빈스31 앞 버스승강장)	양천공원	3.9	16.8	65.5	인력	야간	4	T=10cm
11	오목로 39 (벽산부동산 앞 버스승강장), 2차로	과학수사연구원	2.0	17.0	34.0	인력	야간	4	T=10cm
12	중앙로 235 (올레 앞), 1차로	구로소방서	3.0	10.0	30.0	인력	야간	6	T=5cm
13- 1	국회대로 (영동초등학교 교차로), 3차로	영등포경찰서	3.2	32.0	102.4	기계 (5a)	야간	6	T=10cm
13- 2	버드나루로 80 (밧데리 365할인마트 앞), 1~2차로	영등포경찰서	9.8	13.0	127.4	기계 (5a)	야간	6	T=10cm
14	의사당대로 3 (국회의사당역 2번출구 앞), 4차로	국회의사당	4.4	7.5	33.0	인력	야간	4	T=10cm
15	여의서로 (국회6문 앞 자전거도로)	여의하류IC	3.0	217.0	651.0	기계 (10a)	야간	4	T=5cm
16	의사당대로 1 (국회의사당 국회한옥사랑재 앞), 1차로	여의하류IC	3.4	31.9	108.5	기계 (5a)	야간	4	T=5cm
17	여의동로 97 (대우트럼프월드2 앞), 우회전2차로	여의교교차로	4.0	11.5	46.0	인력	야간	8	T=10cm
18	양평로 24-1 (성광 부동산 앞), 버스승강장	당산역	2.0	30.0	60.0	인력	야간	4	T=10cm
19	당산로 214 (부자촌 공인중개사 앞 횡단보도), 3차로	당산중학교	7.5	15.0	112.5	기계 (5a)	야간	6	T=10cm
20	여의대방로 (시범아파트 20동 앞 고가하부도로)	여의나루역	5.2	15.0	78.0	인력	야간	4	T=10cm
21	여의대방로 439 (여의도초등학교 앞 고가하부도로)	샛강역	5.2	15.0	78.0	인력	야간	4	T=10cm

연번	위 치	방 향	지시물량			작업방법	작업조건	차로	비고
			폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)
22	의사당대로 162 (여의도119안전센터 앞)	여의교	24.0	33.0	792.0	기계 (10a)	야간	6	T=5cm
23	선유로 49 (미즈프라자아파트 앞)	서부간선도로	9.7	5.4	52.1	인력	야간	4	T=5cm
24	가마산로 229 (성보빌딩 앞), 1~2차로	고대병원	6.0	10.0	60.0	인력	야간	4	T=5cm
25	남부순환로 95길44 (개봉고가차도 하부)	사성교	5.0	5.0	25.0	인력	야간	4	T=10cm
26	남부순환로 95길54 (삼환아파트 102동 앞)	오류IC	4.4	141.0	620.4	기계 (10a)	야간	4	T=10cm
27	남부순환로 95길54 (삼환아파트 관리사무소 앞)	오류IC	2.6	16.5	42.9	인력	야간	4	T=10cm
28	남부순환로 95길88 (남부순환로 진입램프)	오류IC	3.8	39.8	151.2	기계 (5a)	야간	4	T=10cm
29	남부순환로 95길34 (개봉고가차도 하부)	광복교	6.3	7.0	44.1	인력	야간	4	T=10cm
30	오리로 1198 (구 동부제강 앞), 1차로	궁동	4.0	17.0	68.0	인력	야간	6	T=5cm
31	오리로 1198 (구 동부제강 앞 지난), 2차로	궁동	3.2	10.0	32.0	인력	야간	6	T=5cm
32	중앙로288 (국민순대국 월편), 좌회전차로	신정네거리역			5h		야간		사후
33	강서로 381 (마곡시티공인중개사 앞), 좌회전차로	우장산역			4h		야간		사후
34	영등포로 144 (진로아파트 104동 앞), 버스승강장	영등포로터리			8h		주간		사후
35	남부순환로 (가리봉의원 앞), 우회전차로	디지털단지			2h		주간		사후
36	영등포로 149 (이레부동산 앞), 버스전용차로	오목교			8h		주간		사후
37	경인로 557 (신한은행 앞), 2차로	구로구청			5h		주간		사후
소계					4,964

□ 작업기간

❍ 2018. 7. 18. ~ 9. 20.

□ 소요예산

❍ 249,840천원(시공물량에 따라 추후 정산)

□ 조치계획

❍ 위 사항을『2018년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)』업체로 하여금 보수․정비토록 작업지시하고, 실측물량에 의거 추후 설계변경하여 반영 조치하고자 함.

붙 임 1. 위치도 및 현황사진  1부.

2. 작업지시 내역서(5차)  1부.  끝.