문서번호	기전과-4260
결재일자	2018.8.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	기전과장	동부도로사업소장
유영선	정판식	08/06 송만규

『2018년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사』

설계변경 검토보고(1회)

2018. 8.

동부도로사업소

[기 전 과]

『2018년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사』

설계변경 검토보고(1회)

「2018년 교통신호기 분야 예산재배정 금액 및 낙찰차액 사용계획」과 관련하여 감리단으로부터 제출된 설계변경 요청사항에 대하여 검토 보고 드림.

관련근거

기전과-3786호(2018. 7. 11)

『2018년 교통신호기 신설 및 보수공사 추가 재배정예산 및 낙찰차액 사용계획 보고』

감리사(대영GE18B-08-02호, 2018. 08. 02)

『2018년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사』설계변경서 수정 제출

공사개요 및 설계변경 현황

공사개요

- 공 사 명 : 2018년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)

- 도 급 자 : ******************

- 도 급 비 : *************

- 공사기간 : 2018. 03. 07 ~ 2018. 12. 28.

- 감 리 원 : 대영유비텍 주식회사

설계변경 현황

- 설계변경(내역변경) 사유

· 경찰청 교통안전시설물 규제사항 처리, 노후 신호등주, 시각장애인용 음향신호기 교체, 긴급민원처리 등 일상유지보수을 위하여 낙찰차액 및 추가 배정된 예산을 반영하여 공사비 확보 필요

· 신규 공종 추가 : 제어기 설치시 무선통신모뎀(LTE통신모뎀)은 교통운영과 신호운영실에서 설치하므로 내역에서 제외하고 보도굴착복구시 기존 보도블럭 재사용 공종을 추가

- 주요변경 내역

연번	공 종		단위	수량			금 액(원)
				당초	변경	증 감	당 초	변경	증 감
*	********** ************	**	*	*	*	**	**********	*	***********
*	********** *************	**	*	*	*	*	*	*********	*********
*	************	**	**	**	**	*	*********	********	*********
*	********	**	*	*	**	**	*******	**********	**********
*	*********************************	**	*	*	*	*	*********	*********	*********
*	*************** ******************	**	*	*	**	**	*********	**********	**********
*	*************** ******************	**	*	*	*	*	*******	*********	*********
*	*************** ****************	**	*	*	*	*	*******	*********	*********
*	********** ***********	**	*	*	**	**	*******	*********	*********
**	********** ********	**	*	*	**	**	******	*********	*********
**	*********** **************	**	*	*	****	****	*****	*********	*********
**	*********** **************	**	*	*	***	***	******	*********	*********
**	*********** **************	**	*	*	***	***	******	*********	*********
**	*********** **************	**	*	*	**	**	******	*********	*********
**	*********** **************	**	*	*	**	**	******	*********	*********
**	*********** **************	**	*	*	***	***	******	*********	*********
**	*********** **************	**	*	*	***	***	******	*********	*********
**	*********** **************	**	*	*	***	***	******	*********	*********
**	*********** **************	**	*	*	****	****	******	**********	**********
**	*********** ******************	**	*	*	****	****	****	**********	**********
**	*********** ******************	**	*	*	****	****	******	***********	***********
**	*********** ******************	**	*	*	*****	****	******	***********	***********
※ 기타 세부사항은 설계변경 내역서 참조

공사비 변경 내용

*****		****	*****	***
*****		***************	**************	**************
* * *	*******	************	***********	**************
	*****	************	************	*************
	*	*************	*************	**************

감리원 검토의견

- 현장여건에 따라 물량변경과 제어기 설치시 통신모뎀 미설치로 통신모뎀설치를 삭제하고, 보도복구시 기존 보도블럭을 재사용함으로 신규 보도복구 공종 추가와 하반기 예산이 추가 재배정되어 설계변경 시행

보고자 의견

상기 감리원이 설계변경 요청한 사항을 검토한 결과 설계변경 요청내용이 적정한 것으로 판단되어 설계변경을 시행하여 교통안전시설물 규제사항, 민원처리 및 교통신호등 유지관리 에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 추가 재배정예산 및 낙찰차액 사용계획 보고 1부.

2. 교통신호기 신설 및 보수예산 집행 철저 공문 1부.

3. 교통신호기 신설 및 보수사업예산 재배정(하반기)공문 1부.

4. 교통신호기 유지보수공사(연간단가) 설계변경서 수정 제출 1부.

5. 교통신호기 유지보수공사(연간단가) 설계변경 내역서. 끝.