문서번호	설비부-11645
결재일자	2018.8.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
전성완		代이호기	전결 08/23 권오식
협 조

탄천물재생센터 3차(총인) 처리시설 통신공사

준 공 기 한  연 기  검 토  보 고

2018. 8.

도시기반시설본부

(환경설비과)

탄천물재생센터 3차(총인) 처리시설 통신공사

준 공 기 한  연 기  검 토  보 고

「탄천물재생센터 3차(총인) 처리시설 통신공사」시행중 선행공종인 토목공사 지연에 따른 준공기한을 연장하여 공사추진에 만전을 기하고자 함

1		관련근거

○ 통신공사 공사기한 변경 검토 보고(탄천하감 2018-266호, 2018.08.17.)

2		공사개요

○ 공 사 명 : 탄천물재생센터 3차(총인) 처리시설 통신공사

○ 공사위치 : 서울시 강남구 개포로 625일원(탄천물재생센터 내)

○ 공사금액 및 공사기간

(단위 : 원)

구 분	총 차	1 차	비 고
공사금액	95,268,671	20,000,000
공사기간	2017.11.23. ~ 2020.01.22.	2017.11.23. ~ 2018.08.31.

○ 공사내용 : 총인처리시설, 슬러지처리 설비, 약품공급 설비 등                    관련 통신공사 1식

○ 시 공 사 : ㈜한일이앤에스 대표 박완교

○ 감 리 사 : ㈜선진엔지니어링 종합건축사사무소 외 3개사

3		그간 추진현황

○ ‘17. 11.  6 : 공사발주

○ ‘17. 11. 16 : 공사계약

○ ‘17. 11. 23 : 공사착공

○ ‘18.   5. 10 : 지장물 이설 실정보고

○ ‘18.   5. 24 : 실정보고 사항 검토 보고 및 업무지시

○ ‘18.   8. 21 : 통신공사 공사기한 변경 검토 보고서 접수

4		검토내용

□ 준공기한 연장 사유

○ 선행공종인 토목공사 가시설 및 토공사 시행중이며, 건축공사          미시공으로 인하여 통신공사 시공 불가능

※ 토목공사 진행사항(‘18.8.16 현재)

1처리장	2처리장
지장물 이설 및 가시설벽체 설치중	토공 및 가시설 3단 시행중

○ 준공기한 연기 내용

구 분	차 수	준 공 기 한		비 고
		당 초	변 경
통신공사	총차	2017.11.23. ~ 2020.01.22.	2017.11.23. ~ 2020.03.31.	증 69일
	1차	2017.11.23. ~ 2018.08.31.	2017.11.23. ~ 2019.02.14.	증 168일

※ 계약금액 변경 없음

○ 감리단 검토 의견

- 총인처리시설 건축구조물 완료시점이 ‘19.6월말 예정으로 탄천        총인 처리시설 전기공사 공사기한과 동일하게 변경(연장)함이 타당

5		처리의견

○ 공사진행 상황 등 종합적으로 검토한 바 책임 건설사업관리기술자       검토 의견과 같이 통신공사 준공기간을 상기와 같이 연기하여          공정관리에 만전을 기하고자 함

○ 귀책사유 및 지체상금 : 발주처, 미부과

6		행정사항

○ 공사 변경계약 의뢰(총무부)

붙임  감리단 공문 1부.  끝.