문서번호	시설보수과-6480
결재일자	2018.8.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		박병연	08/27 代김상두
협조

- 오목지하차도 외 2개소 보수공사

실정보고에 대한 조치계획 보고

2018. 8.

오목지하차도 외 2개소 보수공사

실정보고에 대한 조치계획

우리 사업소에서 추진중인「오목지하차도 외 2개소 보수공사」와 관련, 감독기관인 서울시설공단으로부터 제출된 현장실정보고 사항에 대한 검토결과 보고임.

※관련근거 : 서울시설공단 공사감독1처-5749, 5751(2018.08.22.)

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 오목지하차도 외 2개소 보수공사

○ 공사기간 : 2018. 5. 9 ~ 2018. 11. 4

○ 공사규모

- 아스콘포장 A=134a, 교면방수 1,572㎡, 신축이음 248m 등

○ 도 급 비 : 731,676,000원

○ 도 급 자 : ㈜금성아트 대표 장윤현

○ 감 독 자 : 서울시설공단

○ 예산현황 : 총공사비 857,706천원

(도급비 731,676천원. 관급자재비 157,863천원. 이전비 68,167천원)

Ⅱ		실정보고 내용

❏ 서울시설공단

○ 현황 및 문제점

1) 구로지하차도 아스콘포장 및 아스팔트조인트 설치를 위해 기존 콘크리트조인트 제거가 선행되어야 하며, 제거 후 차량의 안전한 통행을 위해 콘크리트조인트 제거부분에 대한 초속경콘크리트 복구(기존구조물과의 접합을 위한 케이컬앵커 설치)가 필요

- 초속경 복구 9㎥(B=0.45m, H=0.3m, L=67m)

- 케미컬앵커 설치 360공(𝛷16㎜, L=130㎜, CTC400㎜)

2) 오목지하차도 고탄성매스틱 아스팔트조인트 당초 두께는 8㎝로 설계되어 있으나, 현장 실측결과 기존 아스콘포장 두께가 깊게 설치되어 있어 현장 여건을 감안한 조인트보수 규격변경이 필요

- 당초 설계 : B=30㎝, T=8㎝(15개소, L=113m)

- 현장 실측 : B=30㎝, T=11~18㎝(16개소, L=120m)

▣ 현장 실측

구로지하차도 조인트	오목지하차도 조인트

○ 검토의견

1) 구로지하차도 기존 콘크리트조인트 제거 후 초속경콘크리트로 복구하여 차량의 안전한 통행을 확보하고,(공사비 증 23,364천원)

2) 오목지하차도 고탄성매스틱 아스팔트조인트 두께를 현장 실측결과 평균두께(T=13㎝, 16개소 평균값)로 적용(공사비 증 29,150천원)

○ 개략공사비 증•감 : 증)52,514천원

Ⅲ		실정보고 검토 및 조치의견

○ 서울시설공단의 실정보고 사항을 검토한 결과 구로지하차도 및 오목지하차도 조인트설치에 대한 현장 실정보고 내용은 타당하다고 사료되므로 승인조치 추진하고자 하며,

○ 소요예산은 본공사 이전비를 활용하여 우선 공사를 시행하고 추후 설계변경시 반영 조치하고자 함.

○ 향후 추진계획

- 실정보고 승인처리 및 감독기관인 서울시설공단에 통보

붙임 : 관련공문 및 실정보고서 1부.  끝.