문서번호	공원녹지과-12137
결재일자	2018.9.19.
공개여부	비공개
방침번호

주무관		공원팀장		공원녹지과장		도시관리국장
엄정화		이준근		신재원		09/19 문인식
협조
	생활체육팀장		김진철

★ ◉

2018년 공원녹지 시설 유지관리 공사(연간단가)

설계변경(정산) 검토보고

성   동   구

(공원녹지과)

2018년 공원녹지 시설 유지관리 공사(연간단가)

설계변경(정산) 검토보고

『2018년 공원녹지 시설 유지관리 공사(연간단가)』 추진과 관련하여 긴급 작업지시사항 등을 반영하여 아래와 같이 설계변경(정산)하고자 함.

Ⅰ		사 업 개 요

❏ 사 업 명 : 2018년 공원녹지 시설 유지관리 공사(연간단가)

❏ 사업규모 : 관내 공원, 녹지대 등

❏ 공사기간 : 2018. 2. 8. ~ 2018. 12. 20.

❏ 도 급 비 : 금32,550,000원(금삼천이백오십오만원)

❏ 주요내용 : 수목식재, 위험수목 긴급 제거 등

❏ 계약상대자 : 하늘조경(주) 대표 양희선

Ⅱ		설 계 변 경 내 용

❏ 설계변경 사항: 민원사항 조치 및 긴급 재해 예방(수목제거) 등

○ 1차 작업지시 : 송정마을마당 관목 및 초화 식재

○ 2차 작업지시 : 레미티지 빌라 인근 위험수목 제거

○ 3차 작업지시 : 대현산(수목식재 및 마사토포장), 꽃재어린이공원(블럭포장, 트렐리스 설치 등)

○ 4차 작업지시 : 성동구민체육센터 셔틀버스 주차장인근 식재(문화체육과-9665호)

○ 5차 작업지시 : 응봉근린공원 위험수목 제거 및 휀스설치, 미끄럼틀 보수

○ 6차 작업지시 : 용답동 일대 느티나무 제거 및 수목전지 등

○ 미가입 보험료 정산 등

❏ 세부 지시내용(1~6차)

구 분	시행기간	대상지별 사업내용	소요예산	비고
1차 작업 지시	2018. 4. 9. ~ 2018. 4. 10.	․ 송정마을마당 - 사철나무 등 관목류 5종 830주 - 맥문동 500본 식재	7,930,000
2차 작업 지시	2018. 4. 12. ~ 2018. 4. 13.	․ 레미티지 빌라뒤 - 미루나무 2주, 은행나무 1주, 아까시나무 17주 제거	2,496,248
3차 작업 지시	2018. 5. 19. ~ 2018. 6. 13.	․ 응봉산(대현산) - 마사토포장 700㎡ - 라인벨트 180M - 목재계단 재설치 30단 - 매화나무 식재 10주 - 수목 강전정 14주 - 위험수목 제거 1주 ․ 꽃재어린이공원 - 투수블럭포장 6㎡ - 화강석 경계석 설치 10M - 트렐리스 설치 5경간	17,113,000
4차 작업 지시	2018. 7. 25. ~ 2018. 7. 31.	․ 성동구민종합체육센터 - 선주목 2주 식재 - 회양목 230주 식재 - 초화류 이식 300본 - 자작나무 제거 2주	3,000,000	문화 체육과 요청
5차 작업 지시	2018. 9. 5. ~ 2018. 9. 20.	․ 응봉근린공원 - 산벚나무 제거 3주 - 메쉬휀스 4.5경간 설치, 마사토 포설 - 미끄럼틀 위험방지시설 설치	4,242,000
6차 작업 지시	2018. 9. 5. ~ 2018. 9. 12.	․ 용답동 - 느티나무 등 3종 6주 제거 - 느티나무 등 3종 8주 약전정	4,570,000
제경비 정산		․ 미가입 보험료 정산 - 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료 전감	-291,616

Ⅲ		공사비 변경

❏ 변경내역

(단위 : 원)

구 분	공 사 비				비 고
	당 초	변 경	증 감
도 급 비	32,550,000	39,039,000	증	6,489,000

❏ 예산사용계획

○ 변경방법 : 낙찰차액(2,450천원), 문화체육과(3,000천원), 공원녹지시설개선(1,039천원) 예산을 활용하여 설계변경(6,489천원 증) 시행

○ 낙찰차액 현황

구 분	발주금액	계약금액	낙찰차액	소요예산
도급비	35,000,000	32,550,000	2,450,000	6,489000

※ 4차 작업지시 :  문화체육과-9669(2018.5.1.)호 요청에 따라 시행하여 문화체육과 예산으로 집행

❏ 예산과목:

○ 공원녹지과, 자연과 함께하는 도시개발, 조경정비 및 관리, 공원녹지 시설개선, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01) ---- 3,489,000원

○ 문화체육과, 지역체육진흥, 생활체육육성, 구립체육시설 환경개선 지원, 시설비(401-01) ------------------------------- 3,000,000원

Ⅳ		보고자 의견

❏ 민원처리 및 긴급 위험수목 제거, 미가입 보험료 정산에 따른 변경사항에 대하여 위와 같이 설계변경(정산)처리코자 함

붙  임 : 1. 변경내역서 1부.

2. 제비율 검증대장 1부.

3. 문화체육과 협조공문 1부.  끝.