위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	뉴딜일자리 복합문화공간 설계용역 계약변경 의뢰(계약기간 연장)

1. 재무과-39534(2018.8.23.)호 및 일자리정책담당관-13041(2018.8.16.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 추진 중인‘뉴딜일자리 복합문화공간 조성사업 설계용역에 대한 계약변경을 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 뉴딜일자리 복합문화공간 조성사업 설계용역

나. 계약업체 : 지인디자인(주)(대표 : 박지윤)

다. 계약금액 : 금일천삼십만원정(￦10,300,000원)

라. 계약기간 변경

- 당초 : 2018.8.23.~9.26.

- 변경 : 2018.8.23.~10.12.

붙임 1. 계약기간 연장계획 1부.

2. ********

3. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

	일자리정책담당관
뉴딜일자리팀장	홍승기		일자리정책담당관	09/19 김혜정
협조자
시행	일자리정책담당관-15090	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-5467	/전송	02-768-8851	/		/	부분공개(5)