문서번호	자전거정책과-10738
결재일자	2018.10.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		자전거시설팀장	자전거정책과장
김수영		한정환	10/18 김미정
협조

『청계천 자전거전용차로 』시설개선 사업 추진

2018. 10.

도시교통본부

자전거정책과

『청계천 자전거전용차로 』시설개선 사업 추진

청계천 북측도로변 자전거전용차로의 취약지점에 대하여 교통안전시설 설치 및 시인성을 강화하여 안전사고예방 및 주행환경을 개선하고자 함

1		추진 개요

□ 추진근거

○ 종로~청계천~한강을 잇는 도심 환상형 청계천 자전거전용도로 구축
(자전거정책과-7772(2018.8.2.))

○ 청계천 자전거전용도로 구축 추진 방안 (자전거정책과-10145(2018.10.4.))

□ 추진배경

○ 청계광장~청계7가간 자전거전용도로 구축에 따른 기존 시설 정비 필요

- 청계광장~청계7가간 자전거전용도로(차도높이형) 구축과 연계하여 시설의 규모 및 자전거도로 유형의 일관성 차원에서 시설 정비

○ 기존 청계천변에 설치된 자전거전용차로의 경우 폭 1.1m로 자전거도로 기준 미달 및 안전시설 미설치로 이용시 위험 초래

- 개선구간 : 청계8가~시설관리공단간 2009년 설치된 자전거전용차로 1.4㎞

※ 청계7가~청계8가 구간은 북부도로사업소에서 개선사업 시행

2		시설정비사업 추진계획

□ 기존 자전거전용차로 시설 기준 보완

○ 자전거도로폭 조정에 따른 시설 보완 (폭 1.1m→1.5m)

- 기존 차선 및 노면 표시 정비, 미끄럼 방지시설 도색

○ 자전거도로 유형 변경에 따른 시설 보완(자전거전용차로→자전거전용도로)

- 시선 유도봉, 태양광 LED 매립형표지병, 안내표지판

3		추 진 계 획

□ 자전거전용도로 안전시설 설치 추진

○ 사업구간 : 청계8가~시설관리공단 교차로 L=1.4㎞

○ 추진기간 : 18. 10. ~ 18. 11.

○ 공정별 추진방안

구 분	공 종		물 량	단위	단가	물품규격	추진방식
자전거도로 폭 조정에 따른 시설보완	차선삭제		297	㎡	-	-	수의계약
	차선도색	백색	599	㎡		융창식,일반형
		황색	266	㎡		융창식,일반형
	미끄럼방지 포장재		2,188	㎡	32,000	규격- W-IN40, t3.0 물품번호*********7 우일인더스-현장설치도	조달구매
자전거도로 유형변경에 따른 시설보완	시선유도봉		1,341	EA	16,900	규격-750*80*200 물품번호*********4 ㈜하이큐-현장설치도	조달구매
	태양광LED 매립형 표지병		723 (1.4㎞/4m)	EA	104,000	KH-140W,Ø140*45mm,백색,태양광, 물품번호********6 건화건설-현장설치도	조달구매
	안내표지판 정비 및 설치		150	EA	-	지름 50cm 자전거주의,오토바이 진입금지	수의계약
	옥외광고물부착 방지물		68 (17개교차로*4)	EA	46,000	규격-NOSPT200-10, 물품번호********9 ㈜라소에코텍-현장설치도	조달구매

※ 수량산출 근거 : 도심연계 자전거전용도로망 설치 용역에서 산출

○ 조달 구매액 : 171,383천원 (수의계약은 건별 별도진행)

(단위:원)

조달구매 건명	산출근거	산출액(원)	조달수수료 (0.54%)	계
미끄럼방지 포장재	2,188 × 32,000원	70,016,000	378,090	70,394,090
시선유도봉	1,341 × 16,500원	22,126,500	119,480	22,245,980
태양광LED매립형 표지병	723 × 104,000원	75,192,000	406,040	75,598,040
옥외광고물 부착 방지물	68 × 46,000월	3,128,000	16,890	3,144,890
계		170,462,500	920,500	171,383,000

○ 예산과목 : 교통사업특별회계/자전거정책과/자전거이용활성화 및 교통환경개선  /자전거시설확충 및 관리/도심 핵심축 연결 자전거도로망 구축/시설비(401). 끝.