투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 2차 연기요청(가양나들목 개선공사)

우리과에서 시행하고 있는「가양나들목 개선공사」의 관급자재에 대하여 납품 기한 재 연기를 다음과 같이 요청 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 가양나들목 개선공사 관급자재(엘리베이터) 납품기한 2차 연기

나. 요청내용

소속	품명	규격	물품식별번호	수량	단위	납품기한 연기		비고
						당초	변경
기전 설비과	엘리베이터 (승강기)	승객용엘리베이터, 금영제너럴, GYML-PA24-CO60,60m/min, 24인승, 2층, MRL식	21954091	1	대	2018.11.09	2018.11.30

※ 계약금액 변경 없음

다. 연기사유 : 선행공정(토목 프레임공사) 지연

라. 귀책사유 : 한강사업본부

마. 지체상금부과 : 미부과

붙임 : 1. 관급자재 납품기한 2차 연기 검토 보고서 1부.

2. 조달청 분할납품요구서(물품계약서) 1부.

3. 납품기한 연기 요청서_ (주)금영엘리베이터 1부. 끝.

	기전설비과장
주무관	김재규		기전설비과장	10/30 정임근
협조자
시행	기전설비과-2586	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 서울특별시한강사업본부 시설부 기전설비과	/
전화	02-3780-0645	/전송	02-3780-0744	/	kjkromio@seoul.go.kr	/	대시민공개