투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(배수공 설치구간 포장 깨기 및 복구 수량 추가 반영 승인)

1. 업무지시현장 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 주식회사 천일, 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 주식회사 이산, 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 주식회사 한맥기술, 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 대보건설(주)

2. 작 성 일 자 : 2018-11-14 16:11:01

3. 지 시 내 용

가. 올대감 18-253(‘18. 11. 6.)호와 관련입니다.

나. 『올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사』의 ‘배수공 설치에 따른 포장깨기 및 복구 수량 추가반영’ 실정보고를 승인 하오니, 향후 설계변경에 반영하여 주시기 바라며,

다. 배수공 공사 및 포장 복구시 하자가 발생하지 않도록 철저하게 관리·시공 하여 주시기 바랍니다.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							이현국			터널건설과장					11/14 박일연
협조자
시행			토목부-19353									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2570						/전송			02-3708-2599					/	leehk1@seoul.go.kr												/	대시민공개