문서번호	설비부-15792
결재일자	2018.11.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	11/19 권오식
협조

『한양도성 성북지구 경관조명 개선 전기공사』

실정보고 사항 검토보고

2018. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『한양도성 성북지구 경관조명 개선 전기공사』

실정보고 사항 검토보고

『한양도성 성북지구 경관조명 개선 전기공사 』와 관련 건설사업관리자로 부터 현장 여건에 따른 실정보고 사항이 접수되어 검토 보고함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 한양도성 성북지구 경관조명 개선 전기공사

□  공사기간 : 2018.09.14. ~ 2018.12.13

□  위  치 : 한양도성 성북지구(종로구 와룡공원~혜화문, 길이 1.9km)

□  규  모 : 경관조명 신설 48개, 교체 228개(메탈150w→LED20w)

□  감 리 사 : ㈜진전기엔지니어링

□  시 공 사 : 동명전설

□ 공사금액 : 343백만원(도급 107, 관급 235, 이전비 1)

2		관련근거

□ 진감 18-11-15호(`18.11.15): 감리단 전기공사 실정보고

3		실정보고 내용

주요 변경내역	변경사유	증·감액 (직접비)
-경관조명 석재등 신설 증)3개 -석재등 기초 증)3개	- 설계도서 불일치 ·도면(51개)과 내역(48개)의 수량 불일치하여, 현장 조사결과 도면대로 51개 설치하여야 함	증)335천원
-경관조명 규격변경 3개 (석재등type→투광등type)	- 기존 투광등기구 3개소에 콘크리트 기초가 아닌 암반에 앙카로 설치되어 석재등 설치 불가 (LED20w 규격 변동없음)	증)1,122천원
-표찰 설치 감)22개	- 성북구청(관리기관)과 기존 표찰규격대로 설치하기로 협의하여 기 설치된 석재등 표찰 재사용	감)430천원
-FL-3 모듈교체(LED20w) 감)2개 -FL-1(철거후 석재등 교체) 감)1개 -FL-2(석재등 신설) 증)1개	-설계도서와 현장 불일치 ·현장확인 결과 23,24번은 기존 석재등 아니므로 모듈교체 필요 없음 ·현장확인 결과 28번 기존투광등 철거후 석재등 설치로 되어 있으나, 기존투광등 없어 석재등 신설만 함	감)165천원
<직접비 소계>		증)862천원

□ 변경내용

□   건설사업관리자 의견

○ 설계도면과 내역이 일부 불일치하여 현장조사 결과 위 내용과 같이 수량          조절함이 타당하며, 현장설치 여건성 석재등기구 설치 불가한 지역에는           투광등기구 설치함이 타당함.

4		보고자 의견

□  건설사업관리자의 실정보고 내용이 적정하다 판단되므로 승인하고         추후 설계변경 시 내역 반영하고자 함.

붙 임 : 관련공문 1부. 끝.