문서번호	공공재생과-11223
결재일자	2018.11.21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관	특화공간조성팀장		공공재생과장		재생정책기획관		도시재생본부장
김방용	신명승		홍선기		김성보		11/21 강맹훈
협 조

건축물 유구 이전·복원 용역계약 변경 추진계획

2018. 11.

도시재생본부

(공공재생과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

건축물 유구 이전‧복원 용역계약 변경 추진계획

- 남산 예장자락 재생사업 -

남산 예장자락 재생사업의 사업기간이 변경됨에 따라 연계사업인 「건축물 유구 이전복원 용역」의 계약내용 및 계약기간을 변경하여 시행하고자 함

남산 예장자락 재생사업 준공기한 연기(`18.4.18. 도시기반시설본부) : 당초 `17.8.31~`19.2.27 → 변경 `17.8.31~`19.12.31

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 남산 예장자락 재생사업 부지내 건축물유구 이전․복원 용역

○ 용 역 비 : 355,100,000원

○ 용역기간 : `17. 7. 17. ~ `18.12.8.

○ 용 역 사 : ㈜팜클 대표 전찬민

○ 과업내용

[건축물유구 이전․복원] 6호․9호 건물지 240.86㎡(화강암, 적벽돌 등)

[건축물유구 해체․이동․보관] 남산2청사 계단, 기둥, 폐콘크리트, 송출탑 이동․보관

□ 추진경위

○ ’17. 7.14.	건축물 유구 이전·복원 용역 계약

○ ’17. 8. 1.	발굴유적 보존방안 검토요청(市→문화재청)

○ ’17. 8.11.	보존조치지시에 대한 보존방안 검토 회신(문화재청→市)

○ ’17. 8.31.	발굴유적 및 남산2청사 해체·이전완료

○ ’17.10.25.~11.23.	발굴유적 보존계획(안)에 대한 자문(총7회)

○ ’17.12. 1.	발굴유적 보존에 따른 설계(안) 송부(시→문화재청)

○ ’17.12.13.	문화재청 협의에 따른 설계변경

- 기간변경 : 당초 `17.8.31.~`18.8.30. 변경 `17.8.31.~`18.12.8.

□ 변경 추진계획(안)

○ 변경사항 : 용역비 및 용역기간

구분	기 정	변 경	증·감
용역내용	【건축물 유구 이전‧복원】 ‣6호·9호 건물지 240.86㎡ (화강암, 적벽돌 등) ‣남산2청사 벽체35.1㎡, 바닥 26.4㎡ 【건축물 유구 해체‧이동‧보관】 ‣남산2청사 계단, 기둥, 폐콘크리트와 교통방송 송출탑 이동‧보관	과업내용 변경없음	건축물유구 보관기간(10개월) 추가 및 보관료 증액
용 역 비	*********	*********	************
용역기간	’17.7.17~’18.12.8	’17.7.17~’19.12.31	증) 388일

○ 변경사유

【용역기간 변경 관련사항】

- 건축물유구 복원조성은 남산 예장자락 재생사업 상부공사와 연계된 사업으로 공정상 공원․주차장 하부공사 완료 후 진행 가능

- 남산 예장자락 재생사업 공원․주차장 조성공사 기간연장으로 용역기간 12개월 추가

【예산증액 관련사항】

- 용역기간 변경에 따른 건축물유구 보관기간 연장(10개월)으로 보관료 증액

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 귀책사유 : 우리시

□ 소요예산

○ 증액금액 : 53,900천원

○ 예산과목 : 공공재생 계획수립, 공공개발 및 공공공간 확충, 남산 예장자락 재생사업, 시설비 및 부대비, 시설비

※ 사업예산은 `17년 예산(사고이월)으로 연내 집행불가하여 불용. 계약기간 연장이 불가피하므로 필요예산(사고이월 불용액, 보관료 증액)은 `19년 추경 등으로 확보하여 집행

보관료에 대한 기성 신청시(11월 기준, 12개월 보관료 77,000천원) 122백만원 불용

□ 향후계획

○ ‘18.11.	: 변경계약 의뢰

○ ‘19.12.	: 용역준공

붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.