문서번호	생산관리과-13160
결재일자	2018.12.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
신왕근		한희선	12/03 유성종
협조
	주무관		이상록

『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계)』

시설물 인수·인계 계획

2018. 12.

상수도사업본부

(생 산 부)

『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계) 』
시설물 인수·인계 계획

『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계)』가 완료 됨에 따라  시설물 유지관리를 위하여 시설 및 관련 자료를 뚝도정수센터에 인수 인계코자 합니다.

□ 사업 개요

❍ 사 업 명 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계)

❍ 위    치 : 서울시 성동구 성수동1가1동 685-8 일원

❍ 사업기간 : 2015. 11. 24. ~ 2017. 06. 30.

❍ 도 급 비 : 금3,725,523천원

❍ 시 공 사 : ㈜청미건설(대표 양국진)

❍ 감 리 사 : ㈜한국종합기술(대표 이인제)외 1개사

❍ 사업내용 : 농축조 2지 신설 및 기존 2지 개량,

노후 배출수처리시설 개량

□ 추진 현황

❍ 사업시행 : 2015. 11. 24. ~ 2017. 06. 30.

❍ 준공검사 실시 : 2017. 07. 10.

❍ 상반기 하자검사 실시 : 2018. 03. 08.

-  이상없음

❍ 하반기 하자검사 실시 : 2018. 07. 05.

-  하자 4건 발생

-  관리기관 담당자와 협의 및 의견 수렴

❍ 하자사항 보수 완료 : 2018. 10. 18.

- 확인자 : 본부 생산관리과 신왕근, 기전설비과 이상록

뚝도정수센터 정수시설과 황청연, 정수과 홍기웅

□ 인수․인계내역

❍ 인계 기관 : 상수도사업본부 생산관리과

❍ 인수 기관 : 뚝도정수센터 정수과, 정수시설과

❍ 시설내역 : 세부내역 붙임

- 구조물류

- 기자재류(관급자재)

- 배관 및 밸브류(사급자재 포함)

❍ 하자기간 : 2017.07.10. ~ 2022.07.09

□ 보고자 의견

❍ 사업 및 하자 보수가 완료됨에 따라 시설물의 안정적 유지관리를 위하여 설비를 운영 중인 뚝도정수센텨에 인수 인계코자 합니다.

붙 임 : 시설물 인수․인계서 1부.  끝.