문서번호	설비부-16878
결재일자	2018.12.6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	12/06 권오식
협조

『한양도성 성북지구 경관조명 개선 전기공사』

설계변경 검토보고

2018. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『한양도성 성북지구 경관조명 개선 전기공사』

설계변경 검토보고

『한양도성 성북지구 경관조명 개선 전기공사 』건설사업 관리자로부터 기 실정보고 승인받은 사항과 보험료(안전관리비 포함) 정산에 대한 설계변경 서류가 접수되어 검토 보고함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 한양도성 성북지구 경관조명 개선 전기공사

□  공사기간 : 2018.09.14. ~ 2018.12.13

□  위  치 : 한양도성 성북지구(종로구 와룡공원~혜화문, 길이 1.9km)

□  규  모 : 경관조명 신설 48개, 교체 228개(메탈150w→LED20w)

□  감 리 사 : ㈜진전기엔지니어링

□  시 공 사 : 동명전설

□ 공사금액 : *****************************

2		관련근거

□ 진감 18-12-05호(`18.12.05): 감리단 설계변경서류 제출

3		설계변경 내용

공종	주요 변경내역	변경사유	증·감액 (직접비)
경관조명 설치	-경관조명 석재등 신설 증)3개 -석재등 기초 증)3개	- 설계도서 불일치 ·도면(51개)과 내역(48개)의 수량 불일치하여, 현장 조사결과 도면대로 51개 설치하여야 함	*********
	-경관조명 규격변경 3개 (석재등type→투광등type)	- 기존 투광등기구 3개소에 콘크리트 기초가 아닌 암반에 앙카로 설치되어 석재등 설치 불가 (LED20w 규격 변동없음)
	-FL-3 모듈교체(LED20w) 감)2개 -FL-1(철거후 석재등 교체) 감)1개 -FL-2(석재등 신설) 증)2개	-설계도서와 현장 불일치 ·현장확인 결과 23,24번은 기존 석재등 아니므로 모듈교체 필요 없음 ·현장확인 결과 28번 기존투광등 철거후 석재등 설치로 되어 있으나, 기존투광등 없어 석재등 신설만 함 -야간 조명시연 결과 성곽 어두운 부분에 조명 추가설치
경관조명 철거	-기존 투광등기구 철거 감)1개	·현장확인 결과 28번 기존투광등 없기 때문에 철거 물량 감소	******
소운반비	-소운반비 증)324kg	·석재등 및 기초 5개소 추가에 따른 운반비 증가	*******
<직접비 소계>			*********
제경비(안전관리비 및 보험료 정산)			*********
도급금액			*********

□ 주요 변경내용

○ 단가산정 기준 : 증감물량 기존 계약단가 적용(신규비목 없음)

○ 계약금액(도급비) 변경사항

당 초	변 경	증감액
*************	*************	************

□   건설사업관리자 의견

○ 본 설계변경 사항은 기 실정보고 승인받은 사항과 정산대상인 안전관리비,          보험료 정산에 대한 내용으로 관련 자료 검토결과 위 내용과 같이 계약금액          조정하는 것이 적정함.

4		보고자 의견

□  건설사업관리자가 제출한 설계변경 도서와 보험료 및 안전관리비 증빙        자료 검토결과 적정하므로 계약부서에 설계변경 의뢰하고자 함.

붙 임 : 1)감리단 공문 1부.

2)설계변경 내역서 1부.

3)제비율 검증확인서 1부. 끝