투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기 요청(밤고개로 3차공사)

『밤 고개로 확장공사』3차에 소요되는 관급자재에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기를 요청합니다.

1. 공사명 : 밤 고개로 확장공사 3차

2. 물품명 : 이형봉강외 13종

3. 사  유 : 손실보상지연에 따른 자재사용 시기 미도래

4. 납품기한연기내역 : 붙임조서 참조

붙 임 : 납품기한연기현황 1부.  끝.

	토목부장
★주무관	박상철		광역도로과장	여용석		토목부장	12/06 김영수
협조자
시행	토목부-20654	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2559	/전송	02-3708-2599	/	scpark555@seoul.go.kr	/	대시민공개