“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 변경계약 의뢰(손기정체육공원 근현대건축물내 전시기본계획 수립 용역)

1. 공공재생과-11813(2018.12.7.)호 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진 중인 ‘손기정체육공원 근현대건축물내 전시기본계획 수립 용역’에 대해 아래와 같이 변경계약 의뢰(기간 연장요청)하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

아  래 -

가. 계약건명 : 손기정체육공원 근현대건축물내 전시기본계획 수립 용역

나. 계약금액 : 금49,913,000원(금사천구백구십일만삼천원)

다. 계약기간 : 2018.7.17.~2018.12.31.

라. 계약방식 : 1인 견적 수의계약

마. 업 체 명 : 오퍼센트

- 주  소 : 서울시 용산구 우사단로10길 90

- 담당자 : *********************************

바. 변경내용

구 분	당 초	변 경	비고
용역기간	2018.7.17.~2018.12.31.	2018.7.17.~2019.4.30.	·120일 연장 ·금액 변경 없음

*******************************************************

아. 귀책사유 : 서울특별시(지체상금 미부과)

붙 임 : 1. 준공기한 연장 검토 보고서 1부

2. 준공기한 연기의뢰서 1부

3. 합의각서 1부.  끝.

	공공재생과장
주무관	이유희		서울역재생계획팀장	정병익		공공재생과장	12/10 홍선기
협조자
시행	공공재생과-11855	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)	/
전화	02-2133-8644	/전송	02-2133-0885	/		/	부분공개(6)