“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	두산건설주식회사
(경유)
제목	“신분당선 용산~강남 복선전철 민간투자사업(1단계) 건설공사”도로점용공사장 교통소통대책 변경 승인 요청에 따른 회신

1. 두산건설20189232(2018.12.10.)호 관련하여, 교통소통대책 변경에 대해 아래와 같이 조건부 승인 통보하오니, 성실히 이행하시기 바랍니다.

2. 공사중 교통소통대책 변경으로 인하여 공사기간 및 단계별 교통소통대책에 대한 문제와 추가 변경사항이 발생할 경우 우리시와 반드시 협의(변경 승인 재요청 등)하여 주시기 바라며, 공사로 인한 교통정체 해소 및 보행자 안전사고 예방 등을 지속적으로 실시하면서 공사를 진행하여 주시기 바랍니다.

가. 도로점용공사장 교통소통대책 변경사항

지점	단계	당 초	변 경
논현 정거장	17단계	《 잠원동~논현동 》 ㆍ차로운영(남→북) : 4차로 ㆍ차로운영(북→남) : 5차로 ㆍ점용차로(남→북) : 2차로 (4차로∼5차로) ㆍ공사기간 : ‘18.04.01∼'18.04.11 (10일)	《 잠원동~논현동 》 ㆍ차로운영(남→북) : 4차로 ㆍ차로운영(북→남) : 5차로 ㆍ점용차로(북→남) : 2차로 (3차로∼4차로) ㆍ공사기간 : ‘18.11.25∼'18.12.21 (27일)
		《 반포동~논현동 》 ㆍ차로운영(남→북) : 5차로 ㆍ차로운영(북→남) : 5차로 ㆍ점용차로(남→북) : 3차로 (4차로∼6차로) ㆍ공사기간 : ‘18.04.01∼'18.04.11 (10일)	《 반포동~논현동 》 ㆍ차로운영(남→북) : 5차로 ㆍ차로운영(북→남) : 4차로 ㆍ점용차로(남→북) : 2차로 (4차로∼5차로) ㆍ공사기간 : ‘18.11.25∼'18.12.21 (27일)
	25단계	《 잠원동~논현동 》 ㆍ차로운영(남→북) : 4차로 ㆍ차로운영(북→남) : 5차로 ㆍ점용차로(북→남) : 2차로(버스전용차로∼1차로) ㆍ공사기간 : ‘18.09.01∼'21.12.23(1,218일)	《 잠원동~논현동 》 ㆍ차로운영(남→북) : 4차로 ㆍ차로운영(북→남) : 5차로 ㆍ점용차로(북→남) : 2차로(3차로∼4차로) ㆍ공사기간 : ‘18.12.22∼'21.12.,31(1,116일)
		《 반포동~논현동 》 ㆍ차로운영(남→북) : 5차로 ㆍ차로운영(북→남) : 4차로 ㆍ점용차로(북→남) : 3차로(버스전용차로∼2차로) ㆍ공사기간 : ‘18.09.01∼'21.12.23(1,218일)	《 반포동~논현동 》 ㆍ차로운영(남→북) : 5차로 ㆍ차로운영(북→남) : 4차로 ㆍ점용차로(북→남) : 3차로(버스전용차로∼2차로) ㆍ공사기간 : ‘18.12.22∼'21.12.,31(1,116일)

※ 변경사유 : 지하 지장물로 인한 작업장 위치 이전 및 보강플랜트 설비 설치 관련 점용구간 변경에 따른 교통소통대책 재수립

나. 교통소통대책 변경 조건

① 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례 제6조에 따라 교통소통대책 변경 및 이행 불가능이 예견될 경우, 우리부서로 반드시 제출하기 바람

② 도로점용공사 관련하여 보행자 등 시민의 교통안전을 확보할 수 있도록 보행도우미를 적극 배치하기 바라며, 현장 모니터링을 실시하기 바람

③ 단계별 도로점용 상황에 맞는 교통안내표지판 및 안전시설물 설치

④ 출퇴근 시간대에 공사차량 진출입 금지, 공사시 통제수 배치 및 공사 완료 후 통보하기 바람

○ 도로점용허가를 받지 아니하거나 점용면적을 초과하여 점용함으로써 교통정체를 유발시키는 공사장은 점용허가 및 점용료 징수부서에 통보하여 변상금 또는 과태료를 부과토록 조치합니다.

○ 서울시와 협의하지 않고 공사를 진행도중 교통, 보행 민원이 발생한 경우 공사시행자(시공사, 감리사, 현장소장, 감리단장)에게는 패널티를 부여, 업무담당자는 문책토록 각 기관별 감사담당실로 통보 조치합니다.

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	백바름		교통운영팀장	김옥희		교통운영과장	12/13 강진동
협조자
시행	교통운영과-21174	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	2133-2466	/전송		/	pblqw6293@seoul.go.kr	/	대시민공개