문서번호	거점성장추진단-1704
결재일자	2018.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		산업거점정책팀장	산업거점활성화반장
홍기영		한정훈	전결 12/12 김상춘
협조

G밸리 개발계획 변경 및 실시계획 수립 용역 계약기간 연장 계획

2018.12.

산업거점활성화반

G밸리 개발계획 변경 및 실시계획 수립 용역

계 약 기 간  연 장 계 획

’18.12월 준공 예정 “G밸리 개발계획 변경 및 실시계획 수립용역” 관련, 도시계획 관련부서 협의 등을 통한 내실있는 성과물 도출을 위해 계약기간을 연장하고자 함

□ 용역 개요

○ 계약건명 : G밸리 개발계획 변경 및 실시계획 수립 용역

○ 계약업체 : ㈜미래이앤디

○ 계약기간 : ’16.12.01. ~ ’18.12.28.

○ 계약금액 : 금구억이천사백육십육만원정(￦924,660,000)

□ 추진경위

○ 용역 착수 및 분야별(도시계획, 산업, 건축) 전문가 자문

: ’16.12.~’17.6.

○ 선도사업지 개발 의향조사 및 사업화 방안 검토    : ’17.9.~10.

○ 분야별 전문가 및 관계기관 자문회의             : ’18.1.~3.

○ “산업분야” 내용 보완을 위한 별도 용역 착수     : ’18.6.

○ 산업분야 비전 및 과제별 전략수립               : ’18.7.~

□ 계약연장 사유

○ 과업의 핵심내용 중 하나인 용지변경 관련, 토지소유주 및 주민의견 수렴과 도시계획 부서 및 관계기관 협의 등으로 인해 불가피하게 과업기간 연장 필요

□ 계약기간 연장 계획

○ 당초 : 2016.12.01 ～ 2018.12.28

○ 변경 : 2016.12.01 ～ 2019.10.31(307일 연장)

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 토지소유주 및 주민의견 수렴과 도시계획 부서 및 관계기관 협의를 위해 기간을 연장하는 건이므로 지체상금 미부과

□ 향후일정

○ 2018.12월 : 계약 변경의뢰(→재무과)

○ 2019. 4월  : 개발계획 변경 및 실시계획 결정 입안

○ 2019. 6월 : 관련부서 협의, 주민설명회 및 공람

○ 2019. 8월 : 산업단지계획위원회 심의

○ 2019.10월 : 개발계획 변경 및 실시계획 결정 고시.  끝.