“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	설계 변경 시행(2018년 중앙버스전용차로 흐름개선 설계 용역)

아래와 같이 설계 변경(정산)코자 합니다.

가. 용 역 명: 2018년 중앙버스전용차로 흐름개선 설계 용역

나. 계약기간: 2018. 4. 2. ~ 12. 31.

**********************************

라. 변경(정산) 내역

(단위: 원)

구분	용역비		증감	비고
	당 초	변 경
계	71,659,000	72,400,000	증 741,000

마. 변경사유 : 설계 지점 및 물량 변경 등

바. 예산과목 : 도시교통체계 및 소통개선, 버스서비스 이용제고, 중앙버스전용차로 흐름개선, 시설비(401-01)

붙임  1. 설계 변경 검토 보고 1부.

2. 설계 변경(정산) 내역서 1부.

3. 합의 각서 1부.  끝.

주무관	김재정		BRT팀장	代류근호		교통운영과장	12/13 강진동
협조자	주무관	류근호
시행	교통운영과-21160	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-2474	/전송		/		/	부분공개(5)