문서번호	교량안전과-22339
결재일자	2018.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	특수교량팀장	교량안전과장
나용수	정준용	12/19 김종호

『한강교량 온라인 안전감시시스템 유지관리용역(3차)』

설계변경(2회,정산) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

교량안전과

(특수교량팀)

『한강교량온라인 안전감시시스템 유지관리용역(3차)』

설계변경(2회, 정산) 검토 보고

『한강교량온라인 안전감시시스템 유지관리용역(3차)』시행과 관련 하여 상반기 및 하반기 작업지시에 따른 설계변경에 대한 검토 보고

Ⅰ		관 련 근 거

□ 한강교량 온라인 안전감시시스템 상반기 보수시행
(교량안전과-3955호, 2018.03.08.)

□ 한강교량 온라인 안전감시시스템 하반기 정비계획
(교량안전과-18345호, 2018.10.22.)

Ⅱ		용 역 개 요

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 한강교량 온라인 안전감시시스템 유지관리 용역

○ 용역대상 : 한강교량 11개소
(올림픽, 청담, 원효, 서강, 한강, 성수, 성산, 가양, 행주, 양화, 암사대교)

○ 기    간 : ‘16. 2. 4. ~ ‘18.12.31.(3차 : ‘18. 1. 1.~12.31.)

○ 용 역 사 : ㈜유신+㈜일신이앤씨

○ 용 역 비 : 960,935천원(3차:317,845천원)

Ⅲ		설계변경 검토 내용

□ 상반기 시스템 보완 반영

- 성산대교, 원효대교 데이터로거 교체

- 청담대교 센서 전원공급장치 교체, 서강대교 통신케이블 재포설

- 행주대교 지진시스템 보안 VPN 교체

- 암사대교 처짐계 모듈, 가양대교, 성산대교 무선브릿지 교체

□ 하반기 시스템 보완 반영

- 원효대교 형상측량, 올림픽대교 신축변위계 검증 시행

□ 수량 증감 현황

공 종		단위	당초	변경	증⸱감
가양대교	노후센서 정비	식	1	0	감) 1
	무선브릿지 교체	개소	0	1	증) 1
성산대교	광데이터로거 교체	개소	0	1	증) 1
	무선브릿지 교체	개소	0	1	증) 1
원효대교	데이터로거 모듈 교체	개소	0	4	증) 4
	형상측량	개소	0	23	증) 23
청담대교	계측센서 전원 교체	개소	0	4	증) 4
서강대교	광케이블 포설	m	0	500	증) 500
행주대교	지진 VPN 교체	개소	0	1	증) 1
양화대교	광센서 전원 보수	개소	0	1	증) 1
암사대교	처짐계 모듈 교체	개소	0	1	증) 1
올림픽대교	신축변위계 검증	개소	0	1	증) 1

□ 용역비 증⸱감 현황(총차)                            (단위:원)

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

- 총괄 예산 : 1,090,167천원

□ 용역비 증⸱감 현황(2018-3차년)                     (단위:원)

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

- 2018예산 : 409,280천원

□ 소요예산 충당방법

- 증 된 용역비는 기 확보된 한강교량온라인 안전감시시스템
유지관리 사업예산(409,280천원) 중 원인행위(332,845천원) 후
남은 예산(76,435천원)을 사용하여 설계변경(증53,940천원) 시행

Ⅳ		검토의견 및 조치계획

□ 기 설계변경 작업지시 및 설계변경 자문을 완료 하였으며, 적정하게 보수 완료되어 상기내용과 같이 설계변경 시행코자 함

붙임 : 1 설계변경내역서                      1부
2 상반기 보수내역                     1부
3 하반기 원효대교 형상측량 내역서    1부
4 하반기 올림픽대교 신축거동 내역서  1부
5 합의각서                            1부
6 설계변경 자문회의 결과             1부.   끝.