문서번호	토목부-21721
결재일자	2018.12.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	여용석	12/20 代이동훈

준공기한 연기 검토보고

(남부순환로<개봉1동사거리>평탄화공사 폐기물처리용역 3차)

2018.12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

준공기한 연기 검토보고

(남부순환로<개봉1동사거리>평탄화공사 폐기물처리용역 3차)

선행공종인 토목공사 준공기한 연기에 따라 건설폐기물 준공기한 연기 검토 보고드림.

관련근거

○ 건설폐기물 처리용역 준공기한 연기 요청(3차공사)(동일(감)제18-3588호, ‘18.12.20.)

공사개요

○ 위    치 : 구로구 개봉1동 사거리주변(매봉초등학교 ~ 오류IC)

○ 규    모

- 폐 콘크리트 : 30,426ton (3차 : 2,899ton)

- 폐  아스콘 : 15,799ton (3차 : 2,106ton)

- 혼합폐기물 : 74,128ton (3차 :   -  ton)

- 임목폐기물 : 65,201ton (3차 :   -  ton)

○ 도 급 액 : 총차 762,585,000원 (3차 100,000,000원)

○ 공사기간 : 총차 ‘16. 4. 5. ~ ‘19. 3.30.(3차 : ‘18. 03. 13 ~ ‘18. 12. 31.)

○ 용 역 사 : 탄용환경개발㈜

○ 감 리 사 : (주)동일기술공사 외 3개사

준공기한 연기 검토

○ 사 유 : 선행공종 토목공사 준공기한 연기에 따른 건설폐기물 준공기한 연장

○ 준공기한 변경 내용(3차)

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감
도급비	100,000,000	100,000,000	변경없음
3차분	2018.03.13 ~ 2018.12.31	2018.03.13 ~ 2019.03.30	증 89일

감리 검토 의견

○ 3차 용역 연장은 선행 공종인 토목공사 현장에서 발생된 건설폐기물을 처리하는 용역으로서, 용역기간 연장을 시행하는 것이 타당하다고 사료됨.

○ 원활한 공사수행을 위하여 지방자치단체 공사계약일반조건 제8절 2.(계약기간의 연장)에 의거 준공기한을 연장하는 것이 타당하다고 판단됨.

3차분 잔여공사 추진계획 공정표

공 종		작업량	1월			2월			3월			비고
폐기물	폐콘크리트(무근)	585ton
	폐콘크리트(철근)	2,314ton
	폐 아 스 콘	2,106ton
공 사 비		월 계	20 백만원			40 백만원			40 백만원
		누 계	20 백만원			60 백만원			100 백만원

조치의견

○ 선행공종 토목공사 준공기한 연기에 따른 건설폐기물 준공기한 연기 하고자 함.

○ 준공연기에 따른 귀책 소재 : 도급자에 있지 않음.

○ 지체상금 부과 여부 : 미부과

붙 임 : 1. 감리검토 의견서 1부.  끝.