“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	『2016년 한강교량 온라인 안전감시시스템 유지관리용역』설계변경 시행 및 변경계약 의뢰

1 교량안전과-22339호(2018.12.19.)와 관련입니다.

2 위 호와 관련하여 우리부서에서 시행중인 『2016년 한강교량 온라인 안전감시시스템 유지관리용역』에 대하여 아래와 같이 총차 6회 및 3차 2회 설계변경을 시행하고 변경계약 의뢰합니다.

가. 용 역 명 : 2016년 한강교량 온라인 안전감시시스템 유지관리용역

나. 용역기간 : 2016.02.03. ~ 2018.12.31.

다. 도 급 자 : ㈜유신외 1개사(대표 : 성낙일)

라. 예산과목

1) 교량관리, 한강교량관리, 한강교량 온라인 안전감시시스템, 일반운영비, 공공운영비

마. 설계변경 내역                                                  (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증, 감
총차 -6회	직접인건비	432,922,980	432,922,980
	제경비	184,641,971	184,641,971
	기술료	51,736,851	51,736,851
	직접경비	204,275,919	253,312,679	증) 49,036,760원
공급가액		873,577,634	922,614,032	증) 49,036,760원
부가가치세		87,357,764	92,261,398	증) 4,903,670원
용 역 비		960,935,000	1,014,875,430	증) 53,940,430원
이 전 비		52,419,600	52,419,600	0원
총 액		1,013,354,600	1,067,295,030	증) 53,940,430원

구 분		당 초	변 경	증, 감
3차 -2회	직접인건비	157,454,087	157,454,087
	제경비	62,053,260	62,053,260
	기술료	17,772,000	17,772,000
	직접경비	51,670,740	100,707,500	증) 49,036,760원
공급가액		288,950,000	337,986,760	증) 49,036,760원
부가가치세		28,895,000	33,785,670	증) 4,903,670원
용 역 비		317,845,000	371,785,430	증) 53,940,430원
이 전 비		14,999,680	14,999,680	0원
총 액		332,844,680	386,785,110	증) 53,940,430원

바. 변경사유

1) 계측시스템 보수물량 증가에 따른 직접경비 증가

붙임 : 1 변경 설계내역서        1부
2 설계변경 검토보고서    1부
3 설계변경 사유서        1부
4 합의각서               1부       끝.

	교량안전과장
주무관	나용수		특수교량팀장	정준용		교량안전과장	12/20 김종호
협조자	계약1팀장	조현
시행	교량안전과-22397	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 2층	/
전화	2133-1956	/전송	2133-1429	/	ysna76@seoul.go.kr	/	부분공개(6)