문서번호	정보통신보안담당관-25232
결재일자	2018.12.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	정보통신기획팀장	정보통신보안담당관	정보기획관
신경철	권순복	代권순복	12/21 김태균

2018년 공공 무선 인터넷(WiFi) 구축사업 완료보고

2018. 12

정보통신보안담당관

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2018년 공공 무선 인터넷(WiFi) 구축사업 완료보고

수요(Needs)가 많은 복지시설 및 市 신규조성시설 등에 공공 WiFI구축사업이 완료됨에 따라, 현장을 방문 AP 설치상태, 장비기능, 과업지시서 등에 대한 검수를 실시하여 이상없이 적합하게 설치되어 보고함.

Ⅰ		개 요

□ 추진근거

❍ 민선7기 공약 『와이파이 소외 없는 서울 조성』

- 주거 소외지역 커뮤니티 공간에 와이파이 확대 공급

❍ 2018년 공공 무선 인터넷(WiFi) 인프라 확충 계획(국장방침 ´18.2)

- 복지시설 90시설, 시 신규조성시설 5지역

□ 추진경과

○ 2018년 공공 무선인터넷(WiFi) 인프라 확충 계획 수립 : '18. 2. 9.

- 복지시설 이용시설 및 市 핵심 사업지역에 공공 WiFi 설치

○ 복지 담담부서 업무협의 및 시설 현황 조사 : '18. 3 ~ 4월

- 총 6,405개 시설 중 2,215개 시설에 공공 WiFi 설치가 필요(249 기설치)

○ 복지시설 현장조사 및 담당자 의견수렴 : '18. 5 ~ 6월

- 어르신복지시설 및 50플러스캠퍼스 등 152개 시설 현장조사

○ 발주서류 작성 및 입찰공고 : 7월 ~ 9월

○ 계약 및 착수보고 :  ‘18.9.10

○ 복지시설 및 市 신규 조성시설 공공 WiFi 설치 : '18.10 ~ 12월

○ 공공 WiFi 구축사업 완료 : '18.12. 9

Ⅱ		사업개요

□ 개    요

❍ 건    명 : 2018년 공공 무선인터넷(WiFi) 구축

❍ 사업기간 : 2018.9.10. ~ 12.9(90일)

❍ 계약업체 : *****

❍ 계약금액 : 449.001,310원

❍ 주요과업

- 복지시설 91시설, 시 조성시설 10시설 공공 WiFi 설치

· 무선AP 303, 단독AP 87개, Poe스위치 50, 산업용스위치 14, VPN 12개

- 공공 WiFi 품질향상 및 성능개선(시청 본관 외 11개 시설)

· 삼성 무선AP 270개(평창 올림픽 행사용) 교체

- 공공 WiFi 보안접속 개선

Ⅲ		세부 시설 내역

□ 무선장비 설치수량

❍ 장비별 구매현황(8종 470개)

구분	품 명	규 격	단위	수량
통신 장비	액세스포인트(옥내용)	- 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz/5 GHz), 보안 AP	EA	279
	액세스포인트(옥외용)	- 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz/5 GHz), 내장형 AP	EA	13
	액세스포인트(옥외용)	- 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz/5 GHz). 외장형 AP - 방진/방우 IP/66/IP67	EA	11
	단독형 AP	- IEEE 802.11ac/ 5GHz, 2.4GHz Dual Band, PoE 지원, 최대1300Mbps지원	EA	87
	PoE스위치(8포트)	- Fixed 8-port 100/1000Base-T with POE capability PoE Power Budget 240Watts	EA	50
	산업용스위치 (8포트)	- 1000 Base-X 2포트, 10/100/1000 TX 8포트	EA	14
	VPN	- Fixed I/O 4x10/100 이상, AP 망	EA	12
	테블릿 PC	안드로이드 2, 아이패드 2	EA	4

□ 무선 장비 설치현황

❍ 시설별 장비 설치현황

구분	시설수	AP 수		단독AP	스위치 (Poe)	산업용스위치	VPN
		옥내	옥외
계	101	276	27	87	50	14	12
복지시설	91	272	-	75	49	-	-
신규 조성시설	10	4	27	2	1	10	9

※ 예비장비 별도 : 단독 AP 10개, 산업용 스위치 4개, VPN 3개

❍ 지역별 무선 AP설치 수량(101시설, 380AP설치)

자치구	시설수	AP	자치구	시설수	AP	자치구	시설수	AP
계	25	82	계	46	176	계	30	122
종로구	6	12	도봉구	4	15	금천구	5	25
중 구	5	16	노원구	6	36	영등포구	3	4
용산구	2	4	은평구	13	58	동작구	2	12
성동구	1	8	서대문구	3	12	관악구	4	14
광진구	4	15	마포구	8	25	서초구	5	20
중랑구	2	13	양천구	5	15	강남구	3	13
성북구	1	6	강서구	5	13	송파구	3	7
강북구	4	8	구로구	2	2	강동구	5	27

□ 공공 WiFI 품질개선 및 기능보강

❍ 노후 AP 교체(270AP 교체)

자치구		AP 수	자치구		AP 수
계		185	계		85
시청본관		38	시의회	본관	23
서소문청사	1동	81		별관	25
	2동	38	서부공원녹지사업소		8
	3동	5	서울대공원		13
	5동	15	평화공원		14
	후생동	8	품질시험소(별관)		2

※ 개선효과 : 37Mbps → 79Mbps, 업로드 19Mbps → 105Mbps

❍ 공공 WiFi 보안접속 개선(10단계→4단계로 접속방법 간소화)

① 보안접속 안내	② WiFi 선택	③ 설정(ID, 패스워드)	④ 인터넷 연결

Ⅳ		변경사항

❍ 사 유 : 해당시설에 기존 무선 AP 교체예정이었으나, 공유기 교체 후 인터넷 속도가 현저히 떨어져 신규 인터넷회선을 가설함에 따라 무선 AP의 통합관리(NMS)가 필요, 이에 따라 삼성 AP로 교체 필요(단독형 AP → 삼성 AP)

대상	시설수	당초 (단독AP)	변경 (삼성AP)	사 유
원광실버센터	광진구	3	3	민원발생 및 NMS관리
화곡어르신복지센터	강서구	3	3	민원발생 및 NMS관리
봉제산어르신복지센터	강서구	4	4	민원발생 및 NMS관리
교통지도과 서남지역대	영등포	2	2	NMS 관리
은평의 마을	은평구	2	2	NMS관리

※ 변경 AP는 삼성 기부제품으로 설치(AP 14대)

Ⅴ		검 수

○ 검수기간 : '18. 12. 11 ~ 18(6일간)

○ 대    상 : 101개 시설(복지시설 91, 신규 조성시설 10)

○ 검 수 자 : 2명(정보통신보안담당관 1, (주)선인프라 1

○ 결    과

- AP 설치수량 및 인터넷 속도, 엠블럼 부착상태 등 양호

- 2개시설(AP 4개)에 대해 이용자가 많은 구간으로 AP 위치 변경 요청 완료

※ 공릉어르신복지관, 금천 장애인복지관

○ 현장사진

갈현노인복지관	중랑노인종합복지관	남산공원	응암노인복지관

붙임 : 1. 준공내역서 1부.

2. 납품확인서 1부.

3. 설치확인서 1부.

4. 구축내역 및 검수결과 1부.

5. AP 운영점검표

6. AP 구축 현황 및 집계표

7. 공공 와이파이 AP IP 내역

8. 2018년 공공 무선인터넷(WiFi) 구매설치 완료보고서 1부.                      끝.