문서번호	통계데이터담당관-13563
결재일자	2018.12.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	빅데이터개방팀장	통계데이터담당관
조용현	박은주	12/21 안정준

- 2018년 디지털 시민시장실 고도화 -

용역사업 준공검사 결과보고

2018.  12. 21(금)

정 보 기 획 관

(통계데이터담당관)

2018년 디지털 시민시장실 고도화

용역사업 준공검사 결과보고

“2018년 디지털 시민시장실 구축 고도화” 용역 사업의 준공 검사 결과를 보고 드림

1		사 업 개 요

□ 사 업 명 : 2018년 디지털 시민시장실 고도화

□ 계약업체 : 한컴컨소시엄 (감리업체 : ㈜정보기술감리원)

□ 계약금액 : 금273,600,000원 (감리 27,223,580원)

□ 사업기간 :  `18. 10. 15 ~ `18. 12. 31.

2		준 공 대 상

□ 총 준공금액 : 300,823,580원

○ 본 사 업 : 금273,600,000원(사업비 선 지급금 : 136,800,000원)

○ 감리사업 : 금27,223,580원

(단위:원)

세부사업	예산과목	계약 금액	선 지급액	금회 준공금액	총 준공금액
소 계		300,823,580	136,800,000	164,023,580	300,823,580
디지털 시민 시장실 구축	전산개발비	273,600,000	136,800,000	136,800,000	273,600,000
		27,223,580	-	27,223,580	27,223,580

3		과제 추진 검사 결과

□ 디지털 지능형비서 서비스 구축 : 조건부 완료

○ 음성 데이터 분석 및 개선방안 수립

○ 음성인식 기술 확대 적용 및 기능 개선(1월 시장실 인테리어변경 후 적용)

○ 보고·바인더 자료의 메타데이터 생성 및 관리

○ 보고·바인더 자료 보기 구현

○ 지능형 비서 인터페이스

○ 신규 시각화 콘텐츠 개발(1월까지 연관 데이터 확보 예정으로 적용 보류)

□ 시장결재 문서보기 구현 : 완료

○ 정보소통광장 데이터 활용 및 관리

○ 시장결재 문서보기 구현

□ 혁신사례 시각화 콘텐츠 개발 : 조건부 완료

○ 혁신사례 데이터 현황 활용 및 관리

○ 혁신사례 시가고하 콘텐츠 개발(1월까지 연관 데이터 확보 예정으로 적용 보류)

□ 주요 상황실 화상회의 구축 : 완료

○ 상황실 화상회의 서비스 구축(1월까지 시범적용 완료 후 상황실 적용)

□ 재난안전 서비스 개선 : 조건부 완료

○ 서울시 기 구축된 재난 데이터 현황 활용 및 관리

○ 재난안전 서비스 개선(재난통합관리시스템 사업지연으로 적용 보류)

□ 상시점검 환경 구성 : 완료

○ 안전장소에서 상시점검 환경 구성

□ 일반 요구사항 : 완료

○ 하자보수, 테스트, 보안, 품질, 제약사항, 사업관리, 사업지원 관련

□ 추가 제안사항 : 조건부 완료

○ 시장실 콘텐츠의 다국어 번역 기능 제공

○ 투입인력 적정성 검토 및 인력 교체

○ 브랜드 네임 제공하고 상호협의하여 시스템 적용

○ 시장실과 유사한 테스트 환경 구축(안정화 이후 2월 적용)

○ 공개, 비공개 화면을 선택할 보안장치 제공(1월 시장실 인테리어변경 후 적용)

○ 전문지식 및 기술 교육진행(2월 진행)

○ 운영 서버에 영향 없는 개발환경 구성

○ 원격점검 대상 확대 적용

4		검 사 시 행

□ 검사기간

- 본사업 : 2018.12.18.까지 (재무과-59719호, 2018.12.16)

- 감리사업 : 2018.12.18.까지 (재무과-59731호, 2018.12.16)

□ 검사원지정

- 검수총괄 : 빅데이터개방팀장

- 준공검사자 : 빅데이터개방팀장, 조용현 주무관

※ 서울특별시 재무회계 규칙 용역검수(본청) 2억원 이상 : 담당사무관, 담당주무관 6급이하 1명

검 사 항 목	검 사 내 용
산출물 제출 확인	- 사업별 수행/구축 관련 산출물 - 각종 보고서 및 계획 설계서 산출물 - 준공 산출물(요약본) - 사업 수행/구축 관련 계획서 및 결과서 - 각종 보고서 및 회의록
과업수행 내역 및 이행여부 확인	- 과업수행 관리대상 내역서 - 과업 이행여부 완료 점검표

□ 검사결과 : 과업내용서와 적합하게 추진

○ 검수결과 확인서 : 붙임 1

○ 준공성과폼 : 별도 제출

※ 첨부문서 외 자료는 용량제한으로 정보화사업관리시스템 내 보관

5		향 후 일 정

□ 준공검사(감독)조서 결재 후 재무행정 처리 : 2018.12.21

□ 시스템 안정화 및 하자보수 지원 : 2019.1. ~ 2019.2

붙 임 1. 검수기준서 1부.

2. 완료보고서 1부. (별도 송부)

3. 하자보수 이행 확약서 1부.

4. 감리 보고서 1부.  끝.