투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
(경유)
제목	설계변경 심사요청(서울 소방행정타운 건립(1단계) 전기공사)

1. 서울소방행정타운건립 건설사업단 소방(CM)제19-20(2019.1.29.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 『서울 소방행정타운 건립(1단계) 전기공사』중 계획부서(소방재난본부) 요구사항(2단계 사업중 지하복합훈련시설 등)을 반영한 설계변경사항에 대하여 따로붙임과 같이 설계변경심사 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 :서울 소방행정타운 건립(1단계) 전기공사

나. 공사비 변경현황

(단위:천원)

구 분		당 초	변 경	증.감	비고
총차	직접공사비	2,870,435	3,231,273	증)360,838
	간접비(VAT포함)	1,536,166	1,737,716	증)201,550
	합계	4,406,601	4,968,989	증)562,388

다. 설계변경 사유 : 계획부서(소방재난본부)에서 2단계 작업 대상인 지하훈련장 시설 등에 대해 우선 작업요청이 있어 이를 반영함.

라. 계약심사대상 기준 :『서울시 계약 심사 업무 처리규칙』제3조(계약심사대상사업)제5호 계약금액 20억원 이상 공사의 설계변경에 따른 1회 증액분 또는 2회 이후 누적 증액분이 당해 계약금액의 10%이상인 설계변경 공사.

따로붙임 1. 설계변경 심사요청서 1부.

2. 감리단 검토의견서 1부.

3. 설계도서(별도송부) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	곽용길		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	01/30 임정규
협조자
시행	설비부-1335	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8616	/전송	02-3708-8659	/	yong9345@seoul.go.kr	/	부분공개(5)