“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	공원녹지과-3565		주무관	공원조성팀장		공원녹지과장		★도시환경국장
			최형인	이문기		김현경		전결 02/18 안재혁
등록일자	2019.2.15.
결재일자	2019.2.18.
			협조자
공개구분	대시민공개
					기획재정국장		장원석
					재무과장		이준택
					계약팀장		이영순

- 학교의 자연친화적 교육환경과 지역거점 녹지제공을 위한  -

2019년 에코스쿨 조성사업 추진계획

2019. 2.

	강 남 구
	공원녹지과

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 • 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」(행정자치부 예규 제70호, 2016.11.14.) • 「엔지니어링사업대가의 기준」(산통부 고시 제2017-067호, 2017.5.15.)
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 2019년 에코스쿨 조성사업 추진계획 통보(조경과-931호(2019.01.07.))
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 2019년 에코스쿨 조성사업 추진계획 통보(강남구 – 600백만원)
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 수혜자 및 수혜범위 : 지역주민 및 일반시민 등
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( O ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( O ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( O ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 도면작성용역 및 공사 진행시 필요에 따라 전문가 자문 예정

- 학교의 자연친화적 교육환경과 지역거점 녹지제공을 위한  -

2019년 에코스쿨 조성사업 추진계획

우리구 도심 생활권내 고르게 분포하고 있는 학교에 숲과 자연학습장, 입체형 녹화 등 다양한 유형의 생태학습공간을 조성하여, 자연친화적 교육환경 제공 및 쾌적한 지역거점 녹지를 확충하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 서울시 도시녹화 등에 관한 조례 제8조(공익시설의 녹화기준 및 녹화계획)

□ 2019년 에코스쿨 조성사업 추진계획 통보(조경과 931호 - ’19.1.17.)

Ⅱ		추 진 방 향

□ 사업 저변 확대를 위한 타기관 협업 활성화

▶ ‘교육청 꿈을 담은 놀이터 만들기 사업’ 과 연계

□ 입체형 녹화 및 기후변화에 대응하는 녹지공간 조성

▶ 옥상 및 벽면녹화 등 입체녹화(녹색커튼 적극 도입)

□ 지속적인 사후관리 체계 안착

▶ 에코스쿨 추진위원회를 중심으로 설계 및 사후관리에 적극 유도

Ⅲ		사 업 개 요

□ 기    간: 2019. 2. ~ 10.

□ 대 상 지: 대치초등학교 등 4개소

□ 사 업 비: 600백만원(시비)

□ 사업내용: 학교숲, 자연학습장 조성

대 상 지	주 소	사 업 비(백만원)	사업내용	비 고
대 치 초	대치동 505	150	학교숲 조성
포 이 초	개포동 1273	150	학교숲, 자연학습장 조성
신 구 초	신사동 550-11	150	학교숲 조성
압구정초	압구정동 461	150	학교숲 조성

Ⅳ		추 진 계 획

□ 추진기간: 2019. 2. ~ 10.

□ 추진방법: 에코스쿨 추진위원회 구성 -> 실시설계 -> 시설공사

< 에코스쿨 추진위원회 구성 >

․ 구성일시 : 2019. 2.까지

․ 역    활 : 이용자 수요와 주변환경을 고려한 에코스쿨 조성(안) 도출

․ 구성위원 : 학생, 학부모, 교사, 시·구의원, 교육청 관계자 등

< 실시설계용역 시행>

․ 용역기간 : 착수일로부터 90일

․ 용 역 비 : 금27,500천원

․ 계약방법 : 전자공개 수의계약

․ 참가자격 : 건설기술진흥법 제2조, 제3호 또는 엔지니어링산업진흥법 제2조 제1호 및 제21조에 의한 엔지니어링 사업주체로서 주된 사무소가 서울시에 소재한 업체

< 시설공사 시행>

․ 공사기간 : 착수일로부터 90일

․ 공 사 비 : 금572,500천원

․ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

․ 참가자격 : 건설산업기본법에 의한 조경공사업 면허소지업체로서 주된 영업소가 서울시에 소재한 업체

□ 소요예산: 600백만원(시비, 보조금)

□ 예산과목: 조경과, 생활주변 녹지확충, 시민참여 녹지조성, 에코스쿨 조성, 자치단체 자본보조(403-01)

Ⅴ		추 진 일 정

□ 2019.      2.  : 기술용역 타당성 심사, 에코스쿨 추진위원회 구성

□ 2019. 3. ~ 6.  : 실시설계용역, 학교별 사업설명회 개최

□ 2019. 7.       : 계약심사 등 관련절차 이행

□ 2019. 8. ~ 10. : 공사 시행

붙임  1. 위치도 및 현황사진 각1부.

2. 학교별 사업계획서 각1부.

3. 2019년 에코스쿨 조성사업 추진계획 통보 1부.

4. 2019년 에코스쿨 조성사업 추진계획(市) 1부.

5. 에코스쿨 협약서(안) 1부. 끝.