문서번호	역사도심재생과-11388
결재일자	2018.9.21.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

		시 민
주무관	도심계획팀장	역사도심재생과장
정화영	이승완	09/21 양병현

필동 일대 교통영향평가 및 환경영향평가 용역

준공기한 연기보고

2018. 9.

도시재생본부

(역사도심재생과)

필동 일대 교통영향평가 및 환경영향평가 용역

준공기한 연기보고

□ 용역개요

○ 용 역 명: 필동 일대 교통영향평가 및 환경영향평가 용역

○ 과업기간: 2016. 3. 14. ~ 2018. 10. 5.

○ 계약금액: 금64,874,000원(금육천사백팔십칠만사천원정)

○ 계약업체: ********

○ 주요 과업내용: 필동 일대 지구단위계획 결정에 따른 교통 및 환경 변화를 예측하고 교통 상의 장애 등 제반 교통, 환경 문제에 미치는 영향을 검토․분석하여 개선대책 수립

□ 추진현황

○ `17.   3. 14.   계약 체결

○ `17.   3. 17.   용역 착수

○ `17.   3. ~     기초자료 조사 등

○ `18.   1. 16.   준공기한 연장(당초: `18. 1. 16. → 변경: `18. 10. 5.)

□ 변경내역

○ 준공기한: 당초 `18. 10. 5. ⇒ 변경 `18. 12. 31.

○ 귀책소재: 서울특별시

○ 지체상금 부과 여부: 미부과

○ 연기사유

- *****************************************************************************************************

※ **********************************************************************************************************************************

*****************************

□ 향후계획

○ 준공기한 연기 의뢰 (재무과)

붙임  1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 계약기간 연장 공문, 합의각서 및 변경공정표 각 1부.  끝.