“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	시내버스 한시적 우회 연장 요청

1. 버스정책과-4016(2019.2.13.)호와 관련입니다.

2. 우리시에서 시행하고있는 『우이3교 성능개선 공사』와 관련하여 아래와 같이 시내버스 한시적 우회운행 요청한 사항에 대하여 기간연장을 요청 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 협조요청 사항

우회전 폐쇄기간		연장사유	경유노선
당 초	변 경
’19.2.16.~’19.7월 공사완료시 (약 5개월)	’19.2.16.~’19.8월말 공사완료시 (약 6개월)	-상행선(강북→도봉방향) 개축공사 지연으로 통행 재개가 지연됨. -이에 따라 기존 교통체계를 유지할 필요가 있어 시내버스 한시적 우회 운행을 연장할 필요	1133번(지선)

붙임 : 관련공문 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	버스정책과장,도봉구청장(교통행정과장)
★주무관	김태형		강북일반교량팀장	손창익		교량안전과장	06/25 김종호
협조자
시행	교량안전과-11177	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동) 1동 2층	/
전화	02-2133-1968	/전송	02-2133-1429	/		/	대시민공개