＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강서수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행-정산(2018년 우장산동외 10개동 상수도공사)

우리사업소에서 시행하고 있는 『2018년 우장산동외 10개동 상수도공사(장기계속공사)』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2018년 우장산동외 10개동 상수도공사(장기계속공사)

나. 공사개요 : 당초 D15~300㎜, L=1,101m,  변경 D15~300㎜, L=1,173m

다. 공사기간 : 2018.04.23. ~ 2019.06.30.

라. 공사업체 : (유)덕혜산업외 1개사  대표 윤상보외 1

마. 설계변경 내역                                                    (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증.감	비 고
총부기금액	***********	***********	************
1차수 금액	***********	***********
2차수 금액	***********	***********	************

바. 설계변경 조정 사유 : 계약물량 증․감

사. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,급배수공사비,신설공사비

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비

상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비

소방용수시설등의설치및관리,소방용수시설설치및보수

붙임 : 1. 설계변경 심의 결과서 1부.

2. 설계변경내역서 및 합의서 1부.  끝.

주무관	이동섭		시설관리팀장	김남구		시설관리과장	이경희		강서수도사업소장	06/26 배현숙
협조자
시행	시설관리과-12743	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동)	/
전화	02-3146-4009	/전송	02-3146-4039	/	youp76@seoul.go.kr	/	부분공개(5)