문서번호	급수운영과-12280
결재일자	2019.7.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
제영도		최춘근	07/12 조세연
협 조
	시설관리과장			정재현

녹에 취약한 노후 상수도관 추가 정비계획

2019.  7.

강남수도사업소

녹에 취약한 노후 상수도관 추가 정비계획

문래동 수질사고 후속대책 관련, 잔여 노후상수도관 조기 정비를 시행하여 최적의 관망 환경을 조성 깨끗하고 안전한 수돗물 공급

1		추진배경

□ 추진배경

○ 영등포구 문래동 일대 아파트 혼탁수 유입 민원발생

- 일  시 : ‘19. 6. 19.(수)

- 내  용 : 혼탁수 유입 민원발생

- 원  인 : 주변 노후배관에서 법정 수질기준(0.5NTU)을 초과한 수돗물유입

□ 추진근거

○ 시장 요청사항 : 문래동 수질사고 관련 개선대책 추진

- 문래동 수질민원 지역 노후관 정비

- 노후 상수도관 정비기간 대폭단축(’22년 →’20년)

2		2019년 하반기 추진계획

□ 사업개요

○ 정비목표 : 9.7㎞(서초구 2.9㎞, 강남구 6.8㎞)

○ 사 업 비 : 8,700백만원

○ 사업기간 : 2019. 7월 ~ 2020년

○ 추진방법 : 단위사업 신규발주, (시행중)연간단가계약 구분 시행

(단위:m, 백만원)

구분 구별	계		단위사업			연간단가
	연장	사업비	건수	연장	사업비	건수	연장	사업비
계	9,736	8,700	1건	2,636	2,500	3건	7,100	6,200
서초구	2,900	2,200	-	-	-	1	2,900	2,200
강남구	6,836	6,500	1건	2,636	2,500	2	4,200	4,000

- 단위사업 발주계획

구분	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	담당자
		구경(㎜)	연장(m)
계 : 1건		200 ~ 300	2,636	2,500
강남구	개포동 649~653번지 외 5개소 배급수관 정비공사	200~ 300	2,636	2,500	제영도

○ 추진방향 : 패스트트랙

- 행정절차 간소화

‣ 사업소 자체 사업계획심사 및 도면심사 간소화(본부 출장심사)

‣ 단가계약 공사 10%이상 증액 시 재발주 규정 ’19년 12월까지 한시적 미적용

‣ 단가계약 공사 1건당 작업지시 공사금액 4천만원 이상 시 제비용 반영으로 허용

○ 세부 일정

<추진완료>

- 2019년 6월         : 물량산출 및 공사발주방법 결정

- 2019년 6.21~7.5  : 도로굴착 사업계획서 작성 및 제출

- 2019년 7.1~7.17  : 현장조사 및 설계 도면 작성

<향후 추진>

- 2019년 7.18        : 설계도면 심사

- 2019년 7.19~7.30 : 설계내역 작성, 계약심사 및 입찰공고(긴급)

- 2019년 8월          : 단위공사 발주 계약 및 착수

- 2019년 9월~12월   : 터파기 및 관부설, 준공처리

- 2019년 7월~12월   : 단가계약 공사 시행

○ 예정 공정표

구 분	’19년 세부 추진일정
	6월			7월			8월			9월			10월			11월			12월
공사시행 방법 확정 (단가계약 및 단위발주 건수)
도로관리심의 요청
설계 및 도면심사
계약심사 및 입찰공고(긴급)
자재구매
단위발주 계약 및 착수
터파기 및 관부설
단위발주분 준공처리
단가계약 공사시행

3		향후계획

□ 공기 단축을 위한 사전 이행사항 철저 시행

○ (긴급) 입찰공고 시행

○ 수계전환 등 본 공사 착공 이전 이행 사항 완료

○ 공사 입찰 공고(전) 관급자재 구매 계획 수립 및 구매요청

□ 행정사항

○ 유관기관 공사협조요청 공문 발송

○ 설계도면 심사의뢰 ⇒ 누수방지과

○ 발주 전 설계내역서 심사 의뢰 ⇒ 본청 계약심사과

○ 심사결과를 반영 사업발주 및 계약 의뢰 ⇒ 본청 재무과. 끝.