문서번호	시설과-8012
결재일자	2019.8.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
정성오		송병욱	08/06 이규상
협 조
	주무관			최이영

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!’

「국사봉배수지 건설공사」

송수관로 관급자재 일부 사급자재 전환 실정보고

2019. 8.

상수도사업본부

(시  설  과)

「국사봉배수지 건설공사」

송수관로 관급자재 일부 사급자재 전환 실정보고

「국사봉배수지 건설공사」 송수관로 구간 장애물 등으로 계획 변경되어 추가 발생되는 관급자재를 사급으로 전환에 대한 검토내용을 보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 국사봉배수지 건설공사

○ 공사개요 : 배수지 12,000㎥, 송배수관 D=200~1000㎜, L=3.4㎞

○ 공사기간 : 2016. 12. 01.~2019. 10. 09.

○ 도 급 비 : 9,467백만원 (4차 : 1,329백만원)

○ 시 공 사 : 청광종합건설(주) 외 2개사 대표 허숭

○ 감 리 사 : ㈜대한콘설탄트 외 2개사  대표 이영민

□ 보고내용(건설사업관리기술자)

○ 설계도면과 현장여건 상이에 따른 자재 추가 발생

- 송수관로(D=700㎜) 구간 지장물 등으로 갱생 시점부, 종점부 및 은천삼거리 등에서 당초 설계도와 현장여건의 상이로 추가 자재 발생

- 자재 추가 발생 구간

○ 관급자재 출고 소요기일에 따른 추가 자재에 대하여 사급자재 전환

- 관급자재로 공사 시 강관 제작기간 소요로 적기에 납품이 어렵고 또한 공사가 상당기간 지연될 것이 예상됨에 따라 사급자재 전환이 요구됨

※ 구매요청일로부터 강관류 70일 소요【수도자재관리센터-16516(’19.8.1.)】

▹ 사급자재 물량 : 1수 직관(D1000×6m) 등 18종

○ 주요 구간 상세도

구 분	갱생 시점부	갱생 종점부	은천삼거리
당 초
변 경

○ 공사비 증·감 현황(증 22,490천원, 낙찰율(79.995%) 적용)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
사급자재대	-	71,900	71,900	제경비 제외
부가가치세	-	7,190	7,190
도급공사비	-	79,090	79,090
관급자재대	56,600	-	-56,600
총공사비	56,600	79,090	증22,490

□ 건설사업관리기술자 검토의견

○ 자장물 등으로 변동되는 자재를 관급자재로 제공 시 공사시기에 정상적인 반입이 어렵고, 공사가 상당기간 지연될 것이 예상됨에 따라 추가로 발생되는 자재는 사급자재로 전환하여 설계반영함이 타당함

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제13장 공사계약 일반조건 “6(공사 설계의 변경)-6(소요자재의 수급방법 변경)-가”의 규정

가. 관급자재 등의 공급지체로 공사가 상당기간 지연될 것이 예상되어 계약상대자가 대체사용 승인을 신청한 경우로서 이를 승인한 경우에는 이를 서면으로 계약상대자에게 통보해야 한다.

□ 검토의견

○ 지장물 등으로 당초 설계도와 현장여건의 상이로 추가 발생되는 자재에 한하여 사급자재 전환은 건설사업관리기술자의 검토가 타당하고 공사계약일반조건에 적정하므로 실정보고 사항을 승인코자 하며,

○ 공종별 건당 3천만원 이상으로 본부(안전총괄과) 계약금액조정 심사 결과에 따라 설계변경에 반영코자 합니다.

붙 임 : 실정보고 공문 1부.  끝.